투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	「광나루 어린이야구장 조명설치 전기공사」설계변경 및 계약의뢰

우리 본부에서 추진 중인 『광나루 어린이야구장 조명설치 전기공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경 계약을 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 공 사 명: 광나루 어린이야구장 조명설치 전기공사

2. 공사기간: 2020.06.25. ~ 2020.12.31.

3. 공사금액

- 도급비 : 금60,456,460원

- 관급비 : 금49,867,840원

4. 도급업체: 센트로건설 주식회사

5. 변경사유: 현장여건 변동에 따른 물량 증·감

6. 변경금액

구 분		공 사 비(원)		증 감
		당 초	변 경
도급액	공급가액	54,960,418	64,714,782	9,754,364
	부가세	5,496,042	6,471,478	975,436
	도급비계	60,456,460	71,186,260	10,729,800

7. 예산과목: 한강사업본부 공원시설과, 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설 관리 및 개선, 한강공원 직영 체육시설 유지관리, 시설비및부대비, 시설비 (예산편성부서 : 한강사업본부 기획예산과)

붙임  1. 설계변경내역서 1부.

2. 합의각서 1부.

3. 설계변경 보고서 1부.  끝.

							공원부장
주무관							현병철			공원시설과장					최연호					공원부장					12/02 김인숙
협조자				기획예산과장						문영일					총무과장							이상이
시행			공원시설과-5043									(						)		접수											(						)
우						서울특별시 성동구 강변북로 257(성수동1가 642-25) 한강사업본부 공원시설과															/
전화		02-3780-0861						/전송			02-3780-0745					/	qudcjf8441@seoul.go.kr												/	부분공개(7)