문서번호	설비부-19338
결재일자	2020. 12. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		환경설비과장	설비부장
김문호		김오열	12/03 이달영
협 조

『남부순환로(개봉1동 사거리) 평탄화사업 전기공사』

설계변경(총차5회, 2차3회) 검토 보고

2020. 12.

도시기반시설본부

( 설 비 부 )

『남부순환로(개봉1동 사거리) 평탄화사업 전기공사』

설계변경(총차5회, 2차3회) 검토 보고

선행공정 지연에 따른 2차분 내역조정(감액)과 총차 계약기간을 연장코자 하며, 임시가로등 민원발생 조치를 위하여 총차 계약금액 증가 예상됨

***************************************************

***************************************************

***************************************************************

Ⅰ		관 련 근 거

◌ 「공사계약일반조건」제19조(설계변경 등)

◌ 전기공사 설계변경도서 제출(총차5회, 2차3회)

- 동일(감리) 제20-3409(2020.12.2.)호

Ⅱ		공 사 개 요

◌ 공 사 명: 남부순환로(개봉1동사거리) 평탄화사업 전기공사

◌ 공사위치: 남부순환로 오류 IC ~ 매봉초등학교(1.1km)

◌ 공사내용: 가로등 및 교통신호등 이설 및 설치 1식

- 주요설비: 가로등 54본, 가로등 분전반 2대 신설, 교통신호등 지주 11본, 교통신호등 28조 신설, 신호제어기 2대 설치 등

****************************************************

*********************************************

******************************

************************

**********************************

Ⅲ		실정보고 내용

□ 계약금액 변경 내역

(단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증・감	비 고
***	***********	***********	*************
***	***********	***********	*	************
***	***********	***********	**************
***	*	***********	****	******
***	*	***********	****	******

□ 공사기간 변경 내역

구 분	당 초	변 경	비 고
***	**********************	**********************	*******
***	*********************	*********************	****

◌ 검토목적

- 본 공사는 선행공정(토목분야) 진행 중 집단민원에 의한 보완설계 시행 등으로 공사가 지연됨에 따라 후속공정인 전기공사의 2차 내역을 조정하여 추후 공사에 반영하기 위한 설계변경 내역서의 적정성 검토

- 선행공정의 총 공사기간 연장에 따른 전기공사 계약기간 연장 검토

◌ 공사 추진경과(토목부 주관)

- `16. 07. ~ 08. : 집단민원 관련 주민설명회 개최(9회)

- `16. 10. : 현안사항 조치계획 수립(집단민원 해소 전까지 공사일시 중지)

- `18. 10. : 집단민원 구간 공사 재개(방음벽 추가 설치 등 조치)

- `18. 11. ~ `19. 11. : 보완설계 시행

- `20. 1. : 설계경제성(VE) 검토(기술심사담당관)

- `20. 2. : 사업계획 변경 방침(도로계획과)

- `20. 5. ~ 9. : 설계검토 기간(4개월) 공사 중지

- `20. 10. : 공사재개 및 변경계약 체결

□ 2차공사 주요 변경 현황

공 종	규 격	단위	당 초	변 경	증 · 감
***********	******	*	*	*	**	*
***********	******	*	*	*	**	*
***********	*****	*	*	*	**	*
***********	******	*	*	*	**	*
***********	******	*	*	*	**	*
*************
**************	******************	*	*****	*****	**	***
***********	****	*	*****	*****	**	***
*************	********	*	*****	*****	**	***
**************	**********	*	*	***	**	***
******************	******************	*	***	***	**	**
***************	****	*	***	*****	**	***
***************	********	*	***	*****	**	***

◌ 민원발생에 따른 노후 임시가로등 보수 실시

◌ 2차 공사내역 중 가로등(신설, 철거, 이설) 및 신호등(신설, 철거)공사 전체분 감액 후 차수별 내역조정으로 차기 공사분에 반영

◌ 2차분 미진행 공사는 변경된 전체공정에 맞춰 3차(가로등 설비공사), 4차(신호등 설비공사)로 발주하여 진행 예정

□ 공사비 세부 증․감 현황

(단위: 원)

구분	공 종	당 초	변 경	증・감		비 고
**	***	***********	***********	**	*********
	***	***********	***********	**	**********
	*********	**********	**********	**	*********
	******	***********	***********	**	**********
	*****	**********	**********	**	*********
	***	**********	**********	**	*********
	****	**********	*********		-
	********	*********	********		-
	*****	**********	**********	**	*********
	*******	*	*********	**	*********
	*****	***********	***********	**	**********

**	***	********	**********	**	**********
	***	***********	**********	**	**********
	*********	**********	**********	**	**********
	******	***********	***********	**	***********
	*****	**********	*********	**	**********
	***	**********	**********	**	**********
	****	*********	*	**	*********
	*****	**********	**********	**	**********
	*****	***********	***********	**	***********

□ 건설사업관리기술자 검토의견

***********************************************************************************************************************************************************************************************************

*******************************************************************

************************************************************************************

Ⅳ		보고자 의견

***********************************************************************************************************

*************************************************************************************

Ⅴ		향 후 계 획

□ 2020. 12. 4.: 설계변경 계약의뢰

□ 2020. 12. 7.: 3차분 계약의뢰

□ 2020. 12. 9.: 2차분 준공검사

붙임  건설사업관리단 검토 공문 1부.  끝.