“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	서부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행 [갈현동 460번지 외 6개소 장기사용 배급수관 정비공사]

우리사업소에서 시행중인 『갈현동 460번지 외 6개소 장기사용 배급수관 정비공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 갈현동 460번지 외 6개소 장기사용 배급수관 정비공사

나. 도 급 자 : 철중건설(유) 대표 ***

다. 계약기간 : 2020. 05. 06. ~ 2020. 12. 07.

라. 계약금액 변경내역

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증․감	비고
도급액	공급가액	***********	***********	**************
	부가가치세	**********	**********	**************
	계	***********	***********	**************

마. 변경사유 : 시공물량 증․감 및 제경비등 실사용정산에 의한 변경

- 주요 공사금액 변경내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증․감	주요공종
토 공	**********	**********	*************	아스팔트포장절단(200㎜이하) 외
부설공	**********	**********	*************	주철직관 부설공(80㎜,기계) 외
구조물공	**********	**********	*************	원형밸브실 설치공 외
부대공	**********	**********	*************	교통정리원(야간) 외
사급자재비	**********	**********	*************	모래(환토재) 외
제비율	***********	***********	*************	연금보험료 외
합 계	***********	***********	*************

바. 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비[내용연수 경과 취약관로(배급수관)정비]

붙임  1. 설계변경심의위원회 결과 보고 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 제비율 검증확인서 1부.

4. 설계변경 검토보고(공단) 1부.

5. 변경합의서 1부.  끝.

주무관	박새롬		주무관	김혜경		시설운영팀장	김용만		시설관리과장	김홍준
서부수도사업소장	12/03 이종주
협조자	주무관	김재엽
시행	시설관리과-21820	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	02-3146-3695	/전송	02-3146-3739	/		/	부분공개(5)