투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	남산예장자락 재생사업 엘리베이터 설치공사 협조요청

1. 남산예장 감리 제2020-679호(2020.11.27.)와 관련입니다.

2. 귀 부에서 시행중인「남산예장자락 재생사업 기계설비공사」중 엘리베이터 설치지연에 따른 후속공정 진행 및 공사준공(‘20.12.31)에 차질이 우려되고 있는 상황입니다.

3. 특히, 3호기 누드엘리베이터의 경우 후속공정인 유리공사가 엘리베이터 출입문틀(Jamb) 설치완료후 20일이 소요(커플러용접작업 및 실측 7일 + 유리제작 10일 + 설치 3일)되는 상황으로 조속한 엘리베이터 설치가 필요한 상황이오니 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 관련공문 1부.  끝.

	건축부장
수신자	설비부장,방재시설부장
주무관	장도영		의료시설과장	代장도영		건축부장	12/03 이창구
협조자
시행	건축부-20642	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	2133-7114	/전송	2133-0750	/	dyjang77@seoul.go.kr	/	부분공개(5)