문서번호	설비부-19261
결재일자	2020. 12. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	시책사업과장	설비부장
김수진	이종근	12/03 이달영

『동부간선도로 확장(1-2공구) 통신공사』

실정보고 사항 검토보고

2020. 12.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『동부간선도로 확장(1-2공구) 통신공사』

실정보고 사항 검토보고

『동부간선도로 확장(1-2공구) 공사』와 관련, 유지관리기관 요청사항 및 설계보완을 위한 실정보고 내용을 검토하고 보고 드림

1		공사개요

❍ 사 업 명 : 동부간선도로 확장(1-2공구) 통신공사

❍ 공사위치 : 노원구 월계1교 ~ 창동교

❍ 공사규모 : (1공구)도로확장 4→6차로, L=1,4km(지하차도 402m)

(2공구)도로확장 4→6차로, L=3.2km(지하차도 2.9km)

❍ 주요설비 : 비상전화, CCTV, 도로전광표지판, 영상검지기, 라디오재방송

❍ 공사기간 : 2008.12.29 ~ 2020.12.31.

❍ 도 급 비 : 1,750백만원

❍ 감 리 단 : (1공구)㈜도화엔지니어링, (2공구)㈜이산

❍ 시 공 사 : ㈜퓨젼아이앤씨

2		검토내용

관련근거

❍ 동부간선도로 통신공사 실정보고[동부2감-20-734(2020.12.02.)]

❍ 영상검지기 추가 설치 요청[교통정보처-8290호(2020.11.19.)]

❍ 구간단속용 CCTV 설치 요청[경비교통과-9495호(2020.11.12.)]

❍ 설계사 검토의견 회신[경화 제2020-1201호(2020.12.01.)]

실정보고 사유

❍ 유지관리기관(서울시설공단, 도봉경찰서) 요청사항 반영

❍ 현장여건 반영 및 미반영된 설계 보완

실정보고 주요내용

1) 동부간선도로(2~3공구) 시설물 통합 관리를 위한 광케이블 포설

❍ 변경사유

- 서울시설공단 협의사항으로 동부간선도로(3공구) 시설물을 장암전기실에서 정보관리 후, 도봉지하차도 관리사무소에서 통합관리하기 위해 동부간선도로 D13 ~ D14 접속점 간 광케이블 포설이 필요함

❍ 주요 변경현황

품 명	규 격	수 량	개략금액 (직접비)	비 고
광케이블 신설	SM 24C	******	*****	************** ************** **************** ****************

❍ 설치위치

2) 영상검지기 추가 설치 반영 (서울시설공단 요청사항)

❍ 관련근거: 도로부문 지능형교통체계(ITS) 설계편람(국토교통부 2016)

- 간선도로 평균 1km, 최소 500m 간격, 교통류 특성 변화시 검지기 설치

❍ 변경사유

- 서울시설공단에서 운영중인 교통정보센터 교통흐름도에 월계1교~도봉지하차도(1.4km) 구간 교통흐름 끊김 현상 발생

- 원활한 교통정보 수집을 위한 영상검지기(VDS) 1대 추가 설치 요청

❍ 주요 변경현황

품 명	규 격	수 량	개략금액 (직접비)	비 고
영상검지기 신설	고정형	***	*****	디지털
광케이블 신설	SM 4C	******	****

❍ 설치위치

3) 무인교통단속장비(구간단속) 반영 (도봉경찰서 요청사항)

❍ 변경사유

- 도봉지하차도 지하화로 인한 교통수요 증가로 과속에 의한 사고가 우려

- 지점단속카메라 설치시 캥거루 현상 방지 및 지하차도 전체에 대한 속도를 제어하기 위한 구간단속용 과속단속카메라가 필요

※ 캥거루 현상: 자동차가 과속 카메라가 설치된 지점 근처에서만 속도를 줄이고 나머지 구간에서는 과속하는 현상

❍ 주요 변경현황

품 명	규 격	수 량	개략금액 (직접비)	비 고
구간단속카메라	500만화소	***	******	도봉지하차도 입·출구부 설치

4) 지하차도 지자기검지기 광케이블 구성 방식 변경

❍ 변경사유

- 지하차도 통신설비 광케이블 구성 방식이 PTP 방식으로 설계되어 있으나, 지자기검지기 광케이블 구성방식은 AON 방식으로 설계되어 있고, AON 방식 구성을 위한 L2 스위치가 필요하나 설계에서 누락되었음

- 광케이블 및 L2 장비 이상 발생시 지하차도 지자기검지기가 모두 정지되는 것을 방지하고, 유지관리 통일성을 위해 PTP 방식으로 구성 변경이 필요함

❍ 주요 변경현황

품 명	규 격	수 량	개략금액 (직접비)	비 고
광케이블 신설	SM 4C	******	*****	PTP 방식
광장비 신설	RTU장비 외	**	*****

❍ 변경현황

당 초(AON 방식)	변 경(PTP 방식)
센터에서 L2 스위치(광장비)를 통해 단일 케이블로 각 장비로 신호를 전달하는 방식	센터에서 각각의 케이블로 각 장비에 신호를 전달하는 방식

5) 지하차도 관급자재(영상유고감지설비) 계약누락분 반영

❍ 변경사유

- 영상유고감지설비 관급자재 계약 미반영분(네트워크 스위치, 네트워크 장비용 랙, 액정모니터) 반영

❍ 주요 변경현황

품 명	규 격	수 량	개략금액 (직접비)	비 고
영상유고감지설비	네트워크스위치, 장비용랙, 모니터	**	****	계약 미반영분

6) 지하차도 설계보완에 대한 설계용역비 반영

❍ 반영사유

- 서울시설공단 요청사항(레이더 기반 사고감지시스템, 교통관제센터 광전송장비, 영상검지기 추가 설치) 및 도봉경찰서 요청사항(무인교통단속장비) 등 반영을 위한 설계 필요함

❍ 산출근거

- 공사비 금액에 대하여 직선보간법에 의한 요율산정으로 설계비 산출

- 전력 시설물공사 설계 및 설계 감리 요율(산자부 고시 제2005-7호) 적용

- 견적가를 비교하여 최소금액 적용

❍ 주요 변경현황

용 역 명	수 량	개략금액 (직접비)	비 고
동부간선도로(2공구) 통신공사 보완설계용역	**	*****

개략 공사비 검토

❍ 개략 공사비 증감 현황                                   (단위: 천원)

구 분		당 초	변 경	증 감	비 고
도급비	직접공사비	-	*******	*******
	간접공사비	-	*******	*******	제경비 포함
	부가가치세	-	******	******
	합 계	-	*******	*******
설계용역비		-	******	******
총 공 사 비		-	*******	*******

❍ 적용단가 검토

- 기존비목 : 증감내역 – 계약단가 적용

- 신규비목 : 물가자료 및 견적서의 최소단가 × 낙찰률 적용(87.747%)

- 노 무 비 : 2020년 하반기 노임표 적용

건설사업관리기술자 검토의견

❍ 유지관리기관 요청사항 반영한 시공사 제출 변경 설계도서와, 설계사무소 의견 등을 검토한 결과 변경 수량 및 신규단가 등이 타당하며, 실정에 맞게 반영하여 추후 설계변경에 적용함이 적정하다고 판단됨

3		조치계획

보고자 검토의견 및 조치계획

❍ 건설사업관리기술자의 실정보고 내용이 적절하다고 판단되므로 실정보고 승인하고, 추후 설계변경 시 설계변경 소위원회의 의견을 반영하여 총무부에 변경계약 의뢰하고자 함.