코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	준공기한 연기의뢰(서울시 하수도 사업관리 용역)

우리시에서 시행 중인「서울시 하수도 사업관리 용역」에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 서울시 하수도 사업관리 용역 -장기계속 1차

나. 계약상대자 : ㈜이산 외 2개사

나. 변경내역 : (당초) 2020.07.31.~2020.12.31. → (변경) 2020.07.31.~2021.04.30.

※ 총차 용역기간 및 용역비 변경없음

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 1. 준공기한 연기 검토보고서 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	물재생계획과장
주무관	강청금		하수관리팀장	이한복		물재생계획과장	12/03 이임섭
협조자
시행	물재생계획과-15775	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 1동 8층 물재생계획과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3791	/전송	02-2133-1042	/		/	대시민공개