투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	계약변경(총차 1회 1차수 1회) 의뢰(새남터보행육교개선공사

1. 우리 본부에서 추진중인 『새남터보행육교개선공사』에 대하여 아래와 같이 계약변경(총차81, 1차수 1회)을 의뢰합니다.

가. 계약현황

- 공 사 명 : 새남터보행육교개선공사

- 공사기간 : (총차) 2020. 6. 8. ~ ’21. 12. 31.

(1차) 2020. 6. 8. ~ ’20. 12. 31.

- 공 사 비 : (총차) 1,599,308천원

(3차) 1,000,000천원

- 시 공 사 : 삼양건설㈜

나. 계약 변경내용

(단위:원)

구 분		변경 전	변경 후	비 고
계약금액	총 차 (1회변경)	1,599,308,000	1,879,743,000	증) 280,435,000
	1 차	1,000,000,000	1,210,913,530	증) 210,913,530
공사기간	총 차	‘20.6.8.~‘21.12.31.	‘20.6.8.~‘21.12.31.	변경없음
	1 차	‘20.6.8.~‘20.12.31.	‘20.6.8.~‘20.12.31.

다. 변경사유

- 기 실정보고로 승인된 사항에 대한 변경 사항임

라. 예산과목 : 한강사업본부 기반시설과, 한강공원 이용 및 생태환경 개선, 한강 접근체계 개선, 새남터 이촌2동 보행육교 개선, 시설비및부대비, 시설비 (원인행위: 1차수 증) 210,913,530)

붙  임 : 1) 설계변경 요청서(현장대리인) 1부.

2) 설계변경 보고서 1부.

3) 총차 변경 내역서 1부.

4) 1차수 변경 내역서 1부. 끝.

							기반시설과장
주무관							정창수			총무과장					이상이					기반시설과장					12/03 라철흠
협조자				주무관						이은지
시행			기반시설과-4794									(						)		접수											(						)
우	04770					서울특별시 성동구 강변북로 257 (성수동1가 642-25)															/
전화								/전송			02-3780-0744					/													/	대시민공개