문서번호	정수과-8108
결재일자	2020. 12. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	광암아리수정수센터소장
이승열		방진표	12/03 김윤수
협조	주무관		박은경
	주무관		이미숙

유해화학물질 취급시설 정기검사

도서작성 용역 계약기간 연장 (사고이월)

2020. 12.

정 수 과

유해화학물질 취급시설 정기검사

도서작성 용역 계약기간 연장 (사고이월)

우리센터 유해화학물질 취급시설 정기검사 도서작성 용역 관련 코로나19 장기화로 정기검사 수검일이 차기년도로 이월 됨에 따라 계약 기간을 2021. 11. 30 까지 연장 하고자 함.

Ⅰ		개 요

□ 용 역 명 : 유해화학물질 취급시설 정기검사 및 위험성 평가 도서 작성 용역

□ 기   간 : 2020. 2. 14 ~ 2020. 12. 20

□ 용역내용

○ 유해화학물질 취급시설 정기검사 컨설팅

○ 유해화학물질 취급시설 위험성 평가 도서작성 용역

*************************************

********************************

Ⅱ		추 진 내 역

□ 2020. 2. 11 : 용역발주

□ 2020. 2. 14 : 계약일자

□ 2020. 3. 4 ~ 3. 30 : 취급시설 설치기준 컨설팅 실시

□ 2020. 4. 22 : 컨설팅 보고회(업체2명, 업무담당자5명)

□ 2020.  4. 29 : 시설개선 사항 정비 요청(정수과→시설과)

□ 2020. 11. 24 : 위험성평가 도서작성 부분 기성요청

□ 2020. 11. 24 : 위험성평가 도서작성 부분 기성검사

□ 2020. 11. 25 : 위험성평가 도서작성 기성준공*********

Ⅲ		연 장 사 유

□ 코로나19 따른 유해화학물질 취급시설 정기검사 차기년도 이월

○ 관련근거 : 환경부 화학안전과-829(2020. 4.14) - 붙임 1

○ 적용대상 : 2020. 4월 ~ 9월 정기검사 대상 사업장

- 우리 정수센터 예정일자 : 2020. 6. 30

○ 적용기간 : 유예대상 사업장 차기년도 수검일 이월

- 수검 예정일 : 2021. 6. 30

Ⅳ		조 치 계 획

□ 용역기간 변경

○ 당  초 : 2020. 2. 14 ~ 2020. 12. 20

○ 변  경 : 2020. 2. 14 ~ 2021. 11. 30

□ 용역기간 연장에 따른 기간변경 및 사고 이월

○ 사고이월대상 : 유해화학물질 정기검사 도서작성(컨설팅) 용역

○ 예산과목 : 상수도사업비, 영업비, 정수비, 수선유치교체비, 수선유지비

○ 이월금액 : 11,422천원 (기성금 제외)

- 유해화학물질 취급시설 위험성평가 부분 기성준공 처리

Ⅳ		행 정 사 항

□ 용역기간 설계변경 해당업체 합의서 작성 및 준공기한 연기의뢰

□ 유해화학물질 정기검사 도서작성 용역비 사고 이월

붙임 1. 연장사유(환경부) 1부.

2. 합의각서 1부.

3. 준공기한연기의뢰서 1부.

4. 과업지시서 1부. 끝.