투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	관리과장
(경유)
제목	준공기한 연기요청(제3처리장 침전지(A계열) 보수공사)

1. 공사감독2처-19347호(2020.12.1.)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 우리 센터에서 시행하고 있는 『제3처리장 침전지 A계열 보수공사-중랑』건에

대하여 아래와 같은 사유로 준공기한을 연기하고자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공사현황

- 공 사 명 : 제3처리장 침전지 A계열 보수공사-중랑

- **************************

- 공사기간 : 2020. 11. 3.~ 2020. 12. 10.

나. 준공기한

- 당 초 :  2020. 11. 3.~ 2020. 12. 10.

- 변 경 :  2020. 11. 3.~ 2020. 12. 20.

다. 연기사유 : 보수물량 증가 및 신규공종 발생에 따른 절대공기 부족

라. 지체상금 : 미부과

따로붙임 : 1. 준공기한 연기 방침서 1부.

2. 준공연기 요청공문 및  합의서 각 1부.  끝.

	시설보수과장
주무관	이생기		시설보수과장	12/04 임준빈
협조자
시행	시설보수과-7000	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 용답동247-6 (용답동, 중랑물재생센터)	/	www.seoul.go.kr
전화	02)2211-2576	/전송	02)2211-2579	/		/	부분공개(6)