문서번호	도로보수과-12246
결재일자	2020. 12. 4.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		도로보수과장
이이용		12/04 강종훈
협 조

2020년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사

작업지시 완료보고(제6차)

2020. 12.

서부도로사업소

(도로보수과)

2020년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사

작업지시 완료 보고(제6차)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2020년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2020. 03. 25. ~ 2020. 12. 31.

○ 시 공 사 : 우리피앤알(주) 대표 인창호

○ 도 급 비 : 1,064,290,000원

□ 작업완료 보고

○ 건    명 : 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사 작업지시(제6차)

○ 작업위치 : 마포대로 12번지 앞 등 37개소

○ 작업기간 : 2020. 10. 26. ~ 2020. 12. 05.

○ 공사금액

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
도 급 비	205,280천원	152,057천원	감)53,223천원
관급자재	44,085천원	26,295천원	감)17,790천원

○ 작업내역                                          (단위:m)

연번	장 소	당 초	변 경	증·감	변경사유
1	마포구 마포대로 12번지 앞	111	54	감) 57	물량변경(조정)
2	용산구 한강로3가 65-503호 앞	147	0	감) 147	턱낮춤 미완료 (구청 공사중)
3	연희동 334-39호 앞	27	0	감) 27	사업구간 중복으로 제외(32번)
4	홍제동 100-1호 앞	72	0	감) 72	기 작업완료
5	마포대로 186번지 앞	465	465	0	변동없음

6	마포구 양화로 140번지 앞	195	198	증) 3	물량변경(조정)
7	용산구 한남동 525-13호 앞	54	0	감) 54	기 작업완료
8	마포구 상암동 91번지 앞	41	41	0	변동없음
9	연신내역 교차로	20	0	감) 20	기 작업완료
10	용산구 한강대교 북단 교차로	90	30	감) 60	물량변경(조정)
11	마포구 성산동 339-6호 앞	164	128	감) 128
12	은평구 불광동 120(세민하이파크)	490	0	감) 490	턱낮춤 미완료
13	마포구 잔다리로 16 태성빌딩 앞	27	0	감) 27
14	은평구 수색로 188번지 앞	15	14	감) 1	물량변경(조정)
15	은평구 갈현로 10번지 앞	358	0	감) 358	턱낮춤 미완료
16	은평구 응암로 22길 14번지	64	0	감) 64
17	진관2로 31번지(진관동 주민센터)	470	0	감) 470
18	마포구 신석초등학교 앞	2,097	0	감) 2,097
19	중구 장충체육관 사거리 앞	156	0	감) 156
20	용산구 남산도서관 앞	2,210	0	감) 2,210
21	용산구 남산계단길 주변	249	0	감) 249
22	청파로 122~한강로2가 11-8	4,130	0	감) 4,130
23	녹사평대로 한강중학교 앞	457	489	증) 32	물량변경(조정)
24	독서당로 113번지 앞	24	24	0	변동없음
25	효창원로25길 25호 앞	546	0	감) 546	턱낮춤 미완료
26	중림로 실로암사우나 1004 빌딩 앞	181	0	감) 181
27	증가로 홍연2교 교차로~연희지하	1,972	1,957	감) 15	물량변경(조정)
28	구산역사거리 ~ 역촌역오거리	11,870	11,866	감) 4	물량변경(조정)
29	연서로 3길 8(역촌초교 후문)	42	0	감) 42	턱낮춤 미완료
30	장충단로 밀리오레 앞	30,000	1,334	감)28,666	물량변경(조정)
31	마포구 독막로(창천사거리)	0	4,267	증) 4,267	기 작업지시 미공사 구간 공사시행
32	연희교차로 앞	0	1,247	증) 1,247
33	청계3가 교차로	0	338	증) 338
34	동교로 126(성산모터스)	0	457	증) 457
35	은평구 진관3로 20(은평롯데몰)	0	1,179	증) 1,179
36	은평구 백련산힐스데이트	0	698	증) 698
37	응암로(북가좌삼거리~은현교회)	0	12,106	증)12,106

○ 변경사유 : 작업물량 변경(증․감) 및 복합공사 구간(보도턱 낮춤 및 신호등) 미완료에              따른 노면표시 미시행으로 인한 소요예산 감소

□ 향후계획

○ 상기 보고내용과 같이 작업완료분(6차)에 대해 준공 처리

붙 임 : 1. 작업완료 내역서 및 완료사진(별도) 각 1부.

2. 작업완료 도면 1부(별도).  끝.