문서번호	공원시설과-5142
결재일자	2020. 12. 4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	공원부장
현병철		최연호	12/04 김인숙
협조
	주무관		노성제

『한강공원 난지캠핑장 리모델링 공사(전기)』

설계변경(1회) 및 준공기한 연기 검토보고

2020. 12.

한강사업본부

(공원시설과)

『한강공원 난지캠핑장 리모델링 공사(전기)』

설계변경(1회) 및 준공기한 연기 검토보고

우리본부에서 시행중인 『한강공원 난지캠핑장 리모델링 공사(전기)』에 대하여 고용개선지원비 집행 매뉴얼 변경 및 신규공종에 따른 물량 증감을 반영하여 설계변경 하고자 보고 함.

공사개요

○ 공 사 명 : 한강공원 난지캠핑장 리모델링 전기 공사

○ 공 사 비

- 도 급 비 : 307,108,100원

- 관급자재 : 68,770,000원

○ 공사기간 : ’20.8.10. ~ ’21.1.2.

○ 도 급 자 : ㈜진명연합전설

설계변경 내용

○ 주요변경내용

구 분	설 계 변 경 내 용	비 고
전원인입 공사	◼ 관련 공종 추가에 따라 물량 조정 ▸파상형 경질 폴리에틸렌 전선관 ELP 50 : 260 → 570m ▸파상형 경질 폴리에틸렌 전선관 ELP 65 : 310 → 654m ▸케이블 F-CV 35㎟/1C 4열 : 260 → 570m ▸케이블 F-CV 50㎟/1C 4열 : 310 → 630m ▸접지용 전선 F-GV 25㎟ : 570 → 1,200m ▸분전반 기초 400*500*600 : 5 → 7EA ▸핸드홀 600*600*800*T100 : 8 → 10EA ▸토공 : 10 → 20m ▸메인수전 제방분전함 결선 : 0 → 1EA ▸제어반 기초 1500*1500*1200 : 0 → 1EA ▸케이블 F-CV 185㎟/1C, 4열 : 0 → 6m ▸케이블 F-CV 150㎟/1C : 0 → 6m	실정보고 승인통보 [공원시설과 – 4478호 및 4810호]

구 분	설 계 변 경 내 용	비 고
보안등 조명	◼ 관련 공종 추가에 따라 물량 조정 ▸파상형 경질 폴리에틸렌 전선관 ELP 30 : 1399 → 1504m ▸케이블 F-Cv 4㎟/1C 2열 : 320 → 315m ▸케이블 F-Cv 4㎟/1C 4열 : 1,079 → 1,189m ▸접지용 전선 F-GV 4㎟ : 1,399 → 1,504m ▸LED 보안등 50W [3000K] : 7 → 9EA ▸가로등주접속함(ELB내장형) : 47 → 49EA ▸보안등기초 400*600*600 : 47 → 49m ▸핸드홀 600*600*800*T100 : 2 → 4EA ▸관로터파기 : 1,399 → 1,504m	실정보고 승인통보 [공원시설과 – 4478호 및 4810호]
분기전원 설치공사	◼ 관련 공종 추가에 따라 물량 조정 ▸파상형 경질 폴리에틸렌 전선관 ELP 30 : 4,030 → 2,890m ▸파상형 경질 폴리에틸렌 전선관 ELP 40 : 360 → 1,090m ▸케이블 F-Cv 4㎟/3C : 3,560 → 2,675m ▸케이블 F-Cv 6㎟/1C 2열 : 0 → 630m ▸케이블 F-Cv 6㎟/1C 4열 : 470 → 575m ▸케이블 F-Cv 10㎟/1C 4열 : 250 → 890m ▸케이블 F-Cv 16㎟/1C 4열 : 110 → 300m ▸접지용 전선 F-GV 4㎟ : 470 → 1,205m ▸접지용 전선 F-GV 6㎟ : 250 → 890m ▸접지용 전선 F-GV 10㎟ : 110 → 300m ▸기존 분전함 재설치 : 8 → 13EA ▸핸드홀 600*600*800*T100 : 8 → 13EA ▸사이트전원 : 0 → 49EA ▸입상 분전반(소형 6회로) : 0 → 2EA ▸기존 분전함(재구성 8회로) : 0 → 2EA ▸분전반 기초 400*500*600 : 8 → 13EA	실정보고 승인통보 [공원시설과 – 4478호 및 4810호]
고용개선 지원비	◼ 고용개선지원비 공사원가 반영 및 집행 매뉴얼 변경 ▸ 당초 : 고용개선지원비 부가세 제외 ▸ 변경 : 고용개선지원비 부가세 포함	[건설혁신과 – 9310호 (2020.7.20.)]

변경금액

구 분		공 사 비(원)		증 감	비 고
		당 초	금 회
도급액	공급가액	271,201,653	368,061,100	96,859,447
	부가세	27,120,165	36,806,110	9,685,945
	고용개선	8,786,282	공급가액 내 포함	8,786,282
	도급비계	307,108,100	404,867,210	97,759,110	원단위 절삭
관 급 액		68,770,000	70,990,000	2,220,000
총 공 사 비		375,878,100	475,857,210	99,979,110	증

○ 예산과목

- 한강사업본부 공원시설과, 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설 관리 및 개선, 한강공원 난지캠핑장 리모델링, 시설비및부대비, 시설비

(예산편성부서 : 한강사업본부 기획예산과)

준공기한 연기

○ 준공기한 : (당초) 2020.8.10. ~ 2021.1.2.

(변경) 2020.8.10. ~ 2021.3.31.

○ 변경사유 : 시설물 관리 및 안전한 캠핑장 이용을 위하여 개장 전까지 현장관리 필요

조치의견

○ 위와 같이 준공기한 연기 및 고용개선지원비 집행 매뉴얼 변경으로 인한 금액을 조정하고 신규공정에 따른 설계변경을 시행하여 공사 추진에 만전을 기하고자 함.

붙임  1. 설계변경 내역서 1부.

2. 제비율 검증확인서 1부.  끝.