문서번호	시설보수과-6980
결재일자	2020. 12. 4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
이생기		임준빈	12/04 代김광석
협조

『제3처리장 침전지 A계열 보수공사』

준공기한 연기보고

2020. 12.

중랑물재생센터

(시설보수과)

제3처리장 침전지 A계열 보수공사 준공기한 연기보고

우리 센터에서 추진하고 있는 “제3처리장 침전지 A계열 보수공사“ 에 대하여 감독청인 시설관리공단 준공기한 연기 요청 보고에 대하여 아래와 같이 보고함.(공사감독2처-19347호(2020.12.1.))

1		공사개요

가. 공 사 명 : 제3처리장 침전지(A계열) 보수공사

나. 공사기간 : 2020.11.03 ~ 2020.12.10

다. 도 급 비 : ***************

라. 공사개요 : 단면보수(T=30mm 천정) 775.76㎡

단면보수(T=50mm 벽체) 246.92㎡

표면보수 8847.5㎡, 균열보수 840m

마. 도 급 자 : *******************

바. 감 독 청 : 서울시설관리공단

2		공단 보고내용

가. 공정현황

○ 공정율 : 75% 【2020.11.30.기준】

○ 작업완료사항 (실정보고 반영물량 기준[공사감독2처-19290])

- 표면보수 7046㎡, 단면보수 1,052㎡, 균열보수 2483m

○ 잔여작업사항 : 균열보수 1000m, 단면보수 10㎡, 표면보수 2000㎡,

조인트보수 288m

나. 준공기한 연기 사유

○ 현장 조사 결과에 따른 보수 물량 증가 및 신규공종 발생에 따른 추가작업
진행으로 절대공기 부족

- 상부 바닥 균열보수 물량 증가 : 840m → 3483.7m

- 상부 표면보수 물량 증가 : 8847㎡ → 9046㎡

- 신축이음 조인트 보수 공정 추가 : 0m → 288m

- 상부 바닥 단면보수 공정 추가 : 0㎡ → 41.87㎡

○ 추가 소요일수 : 10일

공 종	작업일수 산정(일)			계
	균열보수 및 단면보수	표면보수	신축이음 조인트 보수
소요일수	3	5	2	10

다. 공단 검토의견

○ 현장 조사 결과에 따른 보수 물량 증가 및 신규공종 발생으로 인한 작업일수

증가는 적정하다 판단되며, 추가 소요일 수 만큼 준공기한을 연기하여 품질         확보 및 공정관리에 만전을 기하는 것이 타당하다고 사료됨.

○ 준공기한 연기 검토 결과

- 잔여공종에 필요한 소요일수 : 10일

- 준공기한 변경

구 분	기 간	비 고
당 초	2020년 11월 03일 ~ 2020년 12월 10일
변 경	2020년 11월 03일 ~ 2020년 12월 20일

3		발주처 검토의견

가.  공단 준공연기 요청에 대한 검토한바 보수 물량 증가 및 신규공종 발생으로          인한 작업일수 증가는 적정하다 판단되며, 추가 소요일 수 만큼 준공기한을          연기하고자 함.

나. 준공기한 연기

○ 당 초 : 2020.11.03.~2020.12.10

○ 변 경 : 2020.11.03.~2020.12.20

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

4		조치의견

가.  위와 같은 준공연기보고 요청에 대해 검토한 내용을 시설공단에 통보 하고자 함.

별첨 : 공단 준공연기 공문 1부. 끝.