문서번호	설비부-19456
결재일자	2020. 12. 4.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
정찬교		오삼록	12/04 이달영
협조

『율곡로 창경궁앞 도로구조개선 전기공사』

총차 준공기한 연기 및 4차공사 설계변경 보고

2020. 12.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『율곡로 창경궁앞 도로구조개선 전기공사』

총차 준공기한 연기 및 4차공사 설계변경 보고

우리 본부에서 추진하고 있는『율곡로 창경궁앞 도로구조개선 전기공사』총차 준공기한 연기 및 4차공사 계약금액 변경에 대하여 검토 보고함.

Ⅰ		공사개요

○ 공 사 명 : 율곡로 창경궁앞 도로구조 개선 전기공사

○ 위    치 : 서울 종로구 돈화문 ~ 원남동 사거리

○ 규    모 : 연장 810m(지하차도 320m 포함), 도로 확폭(4차로→6차로)

○ 공사기간(총차) : `14.5.15~ `20.12.31

○ 계약금액(총차) : *********

○ 감리사/시공사: ㈜한국해외기술공사 / 아람이엔테크(주)

Ⅱ		관련근거

○ 준공기한 연기 및 설계변경 보고 [한해기 제20-997호 ('20.12.3.)]

Ⅲ		검토내용

○ 4차공사 계약금액 변경

당 초	변 경	비 고
************	************	**************

- 변경사유 : 준공기한(`20.12.31) 내 실 시공한 물량으로 준공처리하고, 잔여 물량은

내년도 차수 발주 (※총차 계약금액 변경 없음)

○ 총차 준공기한 연기

당 초	변 경	비 고
`14.5.15~`20.12.31	`14.5.15~`21.06.30	증)6개월

- 연기사유 : 선행공정(토목) 준공기한 변경(`21.6.30)으로 후속공정인 전기공사 연기

- 지체상금 부과여부 : 미부과

- 관급자재 연기 내용

구분	계약자	계약금액 (변동없음)	납품기한
			당초	변경
보도등	***	***********	`20.12.31	`21.06.30
가로등기구	****	***********	`20.12.31	`21.06.30
가로등주	****	***********	`20.12.31	`21.06.30
가로등분전반	*****	**********	`20.12.31	`21.06.30
가로등점멸기	*******	**********	`20.12.31	`21.06.30
통신공사	*****	***********	`20.04.27	`21.06.30
CCTV	*********	***********	`20.12.31	`21.06.30
비상벨	*********	**********	`20.12.31	`21.06.30

□ 다수공급자 물품은 60일 이상 연기 불가하여 구매 취소 후 내년도 재구매

○ 건설사업관리인 검토의견

- 토목공사 준공기한(`21.6.30)에 맞춰 전기공사 준공기한을 변경하고 4차공사는 준공기한 연기없이 실 시공분으로 감액하여 준공처리 하고 잔여공사는 5차수 발주 하는 것이 적정함.

Ⅳ		보고자의견

○ 본 사업은 2014년도부터 장기계속공사로 시행중에 있으며 토목공사 준공기한 조정(`20.12월→`21.6월)에 따라 전기공사 기한 연기하고자 하며, 금차공사(4차수) 준공처리를 위해 실 시공분으로 감액 설계변경 하고 잔여 시공분은 내년도 차수 발주함이 타당하다고 사료됨.

붙임 : 건설사업관리단 공문 1부. 끝.