문서번호	정수시설과-8134
결재일자	2020. 12. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
박원석		代서광호	12/04 代박진기
협 조
	주무관			서광호

「2020년 기계설비 유지보수 연간단가 공사」

설계변경 심의위원회 개최

2020. 12.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

「2020년 기계설비 유지보수 연간단가 공사」

설계변경 심의위원회 개최

『2020년 뚝도아리수정수센터 기계설비 보수공사(연간단가)』시행 중

1차수(4,5차작업) 변경사항이 발생됨에 따라 그 내용을 심의하고자 함

▢ 사업개요

○ 사 업 명 : 2020년 뚝도아리수정수센터 기계설비 유지보수공사

○ 계약금액 : 금106,193,100원

○ 계약기간 : 2020. 6. 4. ~ 2021. 5. 31.

○ 제 작 사 : ***********

▢ 심의 위원회 개최

○ 심의일시 : 2020. 12. 4.(금) 11:30 ~

○ 심의장소 : 뚝도아리수정수센터 정수시설과

○ 위원구성

- 위원장 : 정수시설과 공업6급 서광호

- 위  원 : 공업6 이진근, 공업7 곽용찬, 시설7 장현순, 시설6 김영후

▢ 심의내용

○ 설계변경의 타당성

○ 단가 산출 적정여부

○ 제경비 적정산정 및 적용의 적정성 여부

○ 각종 제반 규정 준수여부

○ 기타 관련규정의 불명확한 내용에 대한 검토

▢ 설계변경내역

○ 신규공정 발생 및 시공물량 증감에 따른 설계내역 변경(붙임 참조)

○ 퇴직공제부금비 공사원가 반영

○ 계약금액 변경

구 분	당초	변경	증.감	비 고
계약금액	106,193,100원	106,193,100원	-
1차수 계약금액(2020)	69,435,904원	69,435,904원	-
2차수 계약금액(2021)	36,757,196원	36,757,196원	-

○ 계약기간 : 변경없음

▢ 행정사항

○ 심의결과에 의거 설계변경 시행 및 행정과에 변경계약 의뢰

붙임 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 설계변경 사유서 및 요구서 1부.

3. 설계변경 검토 의견서 및 결정서(양식) 1부.  끝.