문서번호	정수시설과-12614
결재일자	2020. 12. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
양봉우		전훈	12/04 조성태
협조
	주무관		서영호

「암사아리수정수센터 구조물 보수공사」

설계변경 심의 결과 보고

2020. 12.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

『암사아리수정수센터 구조물 보수공사』

설계변경 심의 결과 보고

「암사아리수정수센터 구조물 보수공사」시행 중 변경사항(물량 증·감)이 발생하여, 설계변경 심의를 실시하고 결과를 아래와 같이 보고드림

Ⅰ		공사 개요

□ 공 사 명 : 암사아리수정수센터 구조물 보수공사

□ 공사개요 : 균열보수 629m, 단면보수 210㎡, 표면처리 2,186㎡ 등

□ 공사기간 : 2020. 7. 15. ~ 12. 11.

□ 도 급 액

******************

********************************

□ 계약 상대자 : ***************

Ⅱ		설계변경 심의회 개최

□ 심의일시 : 2020. 12. 4.(금) 10:30

□ 심의장소 : 정수시설과(회의실)

□ 위 원 장 : 정수시설과장 전훈

□ 심의위원 : 시설6급 서영호, 공업6급 김응균, 시설7급 김병주, 공업7급 신대중

Ⅲ		설계변경 현황

□ 설계변경 내용 및 사유

1. 유해화학물질 취급시설 점검 지적사항에 대한 보완조치

- 도장공사 : 1정수장 가성소다 탱크 주변 바닥(방류벽 내) 내알카리성 도료 도장처리(353㎡) 시행(정수과-10316호)

2. 시공물량 증·감 내역

- 주요공종 수량 증,감 현황

공 종	규 격	단위	수 량		증,감(원)
			당초	변경
1. 단면보수공
철근단면복구	T=10mm, 코팅제포함	㎡	40	8	감)3,417,440
표면처리마감(도장포함)	T=1mm	㎡	235	191	감)2,000,372
조인트보수		m	136	0	감)1.275.408
그라인딩		㎡	2,406	2,754	증)3,474,780
에폭시페인트칠		㎡	9	104	증)1,365,910
에폭시페인트칠	라이닝 2T	㎡	44	301	증)9,144,060
2. 부대공
강관조립 말비계(이동)	설치 철거(회당)-2m	회	8	0	감)716,136
강관조립 말비계(이동)	설치 철거(회당)-4m	회	2	0	감)268,064

○ (보험료 정산)근거자료(납입확인서 등) 미제출에 따른 감액

************************

************************

************************

○ (산업안전보건관리비 정산)산업안전보건법에 규정된 항목별 사용내역 정산

************************************************

□ 설계변경 금액                                           (단위: 원)

구 분		당 초	변 경	증·감	비 고
도급비	공급가액	***********	***********	**********
	부가가치세	**********	**********	**********
	계	***********	***********	*************

Ⅳ		심의결과

□ 심의 내용

❍ 설계변경 타당성 여부

❍ 계약물량 증‧감 적정 여부

❍ 제경비 적용 적정 여부

□ 심의결과

❍ 설계변경 타당성 : 타당함

❍ 물량 증‧감 공종 수량산출 적정성 : 적정함

❍ 각종 제반 규정 준수여부 : 적정하게 준수

Ⅴ		조치의견

□ 상기와 같이 설계변경 심의 결과(타당함)에 따라,

□ 우리 정수센터 계약부서인 행정관리과에 변경계약 의뢰하여 설계변경 시행코자 함.

붙임  1. 설계변경 심의 요청 및 결과서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 산업안전보건관리비 사용내역서 1부.

4. 계약금액조정 검증확인서 및 산업안전보건관리비 검토결과서 각 1부.  끝.