“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강동수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행(강동수도사업소 수도계량기 교체공사)

우리 사업소에서 추진하고 있는 『강동수도사업소 수도계량기 교체공사』와 관련 계약물량 감소가 발생하여 설계변경 심의를 마치고 아래와 같이 설계변경을 시행하고자 합니다.

1. 공사명 : 강동수도사업소 수도계량기 교체공사

2. 공사개요 : 품질규격 위반 수도계량기 교체

구경	계	15 ㎜	20 ㎜	25 ㎜	32 ㎜	40 ㎜
기존수량	*****	*****	***	***	***	***
변경수량	*****	*****	***	***	***	***
증감수량	****	***	***	***	***	***

3. 공사기간 : 2020.08.20. ~ 2020.12.07.

4. 계약업체 : 초인산업개발(주) 대표 김귀용

구분	당초금액	변경금액	비고
계약금액	***********	*********** *************	-

5. 설계변경 금액

6. 설계변경 사유 : 물량감소

※ 심도장애, 공가 등 수도계량기 교체장애 사항 발생에 따른 물량감소

7. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수도계량기 교체, 수선유지교체비,

급수계량기교체비

붙임  1. 설계변경 심의 의견서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 합의서 1부  끝.

주무관	최철우		현장민원과장	김인웅		강동수도사업소장	12/04 안병희
협조자
시행	현장민원과-14512	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51	/
전화	02-3146-3010	/전송	02-3146-5079	/	ccwaa@seoul.go.kr	/	부분공개(5)