설계변경 심의 의견서 (강동수도사업소 수도계량기 교체공사)
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	부분공개(5)

1. 공사명 : 강동수도사업소 수도계량기 교체공사

신청부서명	강동수도사업소 현장민원과
공사감독원	지방행정주사 최철우
제출일자	2020. 12. 04

2. 심의 위원회 의견

◦ 심의일시 : 2020.12.04.(금) 09:00

◦ 심의의견 : 설계변경에 따른 심의 결과에 대하여 아래와

같이 의견을 제시함.

위   원

직  위

성  명

서  명

의  견

위 원 장

현장민원과장

김인웅

12/04

김인웅

타당함

위    원

급수운영팀장

임인택

임인택

타당함

위    원

급수관리팀장

양재덕

代제영도

타당함

위    원

시설안전팀장

김주경

김주경

타당함

위    원

주무관

권재순

권재순

타당함

위    원

주무관

신태권

신태권

타당함

담    당

주무관

최철우

최철우

설계변경 사유서

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 강동수도사업소 수도계량기 교체공사

○ 공사기간 : 2020.08.20. ~ 2020.12.07.

○ 도 급 비 : ************

○ 도 급 자 : 초인산업개발(주) 대표 김귀용

□ 설계변경 사유 : 물량감소 등

※ 심도장애, 공가 등에 따른 교체장애 수도계량기 발생

□ 설계변경 내역

○ 물량변경 내역

공종	변경내용		변경사유	비고
	당초	변경
수도계량기(15mm)	*****	**********	물량감소
수도계량기(20mm)	***	********
수도계량기(25mm)	***	********
수도계량기(32mm)	***	********
수도계량기(40mm)	***	********
계	*****	***********

○ 계약금액 변경

공종	변경내용		변경사유	비고
	당초	변경
계약금액	************	************ **************	물량감소

붙임 설계변경 내역서 1부.  끝.