문서번호	시설보수과-4341
결재일자	2020. 12. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	시설팀장	시설보수과장		난지물재생센터소장
신재현	우배용	조선행		12/04 代전영백
협 조

- 최초 침전지 유지보수공사 -

실정보고(1회)에 따른 보고

2020. 12.

난지물재생센터

(시설보수과)

- 최초 침전지 유지보수공사 -

실정보고(1회)에 따른 보고

최초 침전지 유지보수공사 관련 감독기관인 서울시설공단의 실정보고

가 있어 보고함.

□ 관련근거

○ 서울시설공단 공사감독2처-19405(2020.12.2.)호

□ 용역개요

〇 공 사 명: 2020년 최초침전지 보수공사-난지

〇 공사기간: 2020. 05. 15 ~ 2020. 12. 23

〇 도 급 비: 1,515,598천원

〇 공사개요: 단면복구보수(HWD) 5,480㎡, STS보강 54m,

웨어설치 464m, 부대공 1식

〇 도 급 자: 엠투케이건설㈜  대표 이명규

□ 실정보고 내용 (세부내용 붙임 참조)

〇 감독(서울시설공단) 의견

가. 단면보수 침사지 5-8지 물량변경

- 최초침전지 5-8지 스텐레스(STS) 보강구간 축소

나. 감독기관 의견 :

-  5-8지 양호한 구간은 금회 공사에서 제외 시공이 타당함

다. 주요 물량 증· 감 내용

구 분	위 치	규 격	단위	당초수량	변경수량	증·감 수량	비 고
스텐레스 (STS) 보강	5-8지	B=0.85m, t=15mm	㎡	53.7	24.5	감) 29.2

라. 개략 공사비 증·감 내용

구 분	개략 공사비 (단위: 천원)				비 고
	당 초	변 경	증 · 감
공 사 비 (도급비)	74,708	34,084	감)	40,624	제잡비 포함

□ 조치계획

〇 감독기관인 서울시설공단 의견에 따라 설계변경토록 통보하고자 함.

붙임  1. 실정보고서 1부.

2. 관련 공문 1부.  끝.