문서번호	도로보수과-7895
결재일자	2020. 12. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		도로보수과장	남부도로사업소장
김순한		한수영	12/07 변봉섭
협조	주무관		조재민
	주무관		정철식

2020년 지반침하예방사업

설계변경(정산)보고

2020.12.

남부도로사업소

도로보수과

2020년 지반침하예방사업 설계변경(정산)보고

우리사업소에서 시행하는「2020년 지반침하예방사업」과 관련하여 설계변경(정산)에 대한 검토 결과를 보고 드림.

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명 : 2020년 지반침하 예방사업(남부)

□ 위    치 : 금천구, 동작구, 관악구, 서초구·영등포구 일부

□ 공사규모 : *******************

□ 도 급 비 : *********

□ 시 공 사 : 참피온건설(주)

□ 공사기간 : 2020. 3. 23 ~ 12.11

Ⅱ		설계변경 보고사항

□ 설계변경 사유

○ 지반 공동탐사에 의해 조사된 공동 정비에 따른 물량 변경

○ 도로침하지점 긴급보수에 의한 물량 변경 및 제경비 정산

□ 주요 물량 변경내역

공종	규격	단위	당초	변경	증·감
아스팔트 포장절단	야간,휠쇼 30cm	m	*****	*****	*******
동공작업 후 소파포장복구(t=5cm)	야간	a	****	****	*******
동공작업	야간	hr	***	***	*******

□ 이전비 변경내역

내용	규격	단위	당초(천원)	변경(천원)	증·감(천원)
폐기물처리비	1	식	8,832	10,629	증) 1,797
노면표시	1	식	3,483	0	감) 3,483
무인교통단속장비 루프검지선복구	1	식	0	5,814	증) 5,814
소계				16,443	증) 4,128

□ 처리 의견

○ 지반침하 예방사업 추진에 따른 폐기물처리비가 10,629천원 발생되었으나, 공동 정비 수량 증가에 따른 예산 부족(4,128천원)으로

○ 폐기물처리비는 “노후포장 도로정비(포괄예산)”을 활용하여 전액(10,629천원) “불량맨홀 정비공사 폐기물 처리용역”에서 정산지급하고자 함.

□ 설계변경(정산)내역

구 분		당초(원)	변경(원)	증·감(원)
총 공사비		***********	***********	**************
도급비	공급가액	***********	***********	**************
	부가가치세	**********	**********	**************
	계	***********	***********	**************
관급비		**********	**********	****************
이전비		**********	*********	***************

○ 예산과목 : 도로관리과, 도로시설물관리, 도로 및 도로부속물관리, 도로함몰예방사업, 시설비

Ⅲ		조치의견 및 향후계획

○ 폐기물 처리비는 “노후포장 도로정비예산”에서 지급하고, 시공물량 증가에 따라 증액 되는 사업비는 예산(275,000천원) 범위내에서 설계변경처리코자 함.

붙임 : 1. 설계변경내역서 1부.

2. 검증확인서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.