문서번호	건축부-20852
결재일자	2020. 12. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축총괄과장	건축부장
김성권		유현수	12/07 이창구
협조	주무관		박진국
	주무관		이준범

『세운상가군 공공공간 조성공사』

보도포장 야간공사에 따른 검토보고

2020. 12.

도시기반시설본부

건  축  부

『세운상가군 공공공간 조성공사』

보도포장 야간공사에 따른 검토보고

********************************************************************************************************************

※ 관련근거 : 세운CM(건) 제2020-1146호(20.11.18) 보도포장공사에 따른  실정보고

Ⅰ		공사개요

○ 위    치 : 서울특별시 중구 을지로 158(을지로~마른내로~퇴계로)

○ 규    모 : 보행데크 신설·정비, 공중보행교(2개소), 공공임대셀(24개소),

을지로 지하 연결통로 조성 등

○ 공사기간 : 2018.09.10 ~ 2020.10.09

○ 공 사 비 : 금23,142,717천원(2차:19,349,717,000원)

○ 시 공 자 : 에스테크건설(주) 대표 성하범 외 1개사

○ 감 리 자 : ㈜토문엔지니어링 건축사사무소 외 1개사

Ⅱ		보고(검토)내용

○ 공사중 교통처리계획 조건에 따른 작업시간 변경

- 공사중 교통처리대책에 따른 교통안전시설물 개선 설치에 따른 규제심의 조건 반영(교통관리과-28600)

○ 공사장 여건 및 조건을 반영한 공사여건 변경

- 작업구간 보행자 및 차량운행(아파트,상가) 차단에 따른 상가 생존권 보장 및 주민의 통행불편 해소 요구 수용

- 보도블럭 포장공사 공종에 포함된 경계석 및 기초콘크리트 타설 등에 대한 모든 공사를 여견 및 조건을 반영한 공사시간 변경(주간→야간)

○ 당초 설계시 누락 및 증가된 자재비 반영에 따른 공사비 증가

- 자재비(시각장애인 유도블럭) 누락분 및 증가분 반영

Ⅲ		감리단 검토의견

○ 공사 현장과 작업여권의 특수성을 감안 보도포장공사 야간시행과 물량산출, 단가적용 등은 적정하게 반영 하였음,

○당초 설계에서 누락된 장애인 편의시설(점자·유도블럭) 추가로 반영하여 시행하는 것과, 포장공사후 시공현황을 조사하여 정산처리 후 설계변경코자 합니다.

Ⅳ		공사비 증감 현황

○ 공사비 증·감 주요공종

- 시공중 민원해소 및 교통규제 심의 조건(주간→ 야간)에 따른 공사비 증가

- 자재비(점자·유도블럭) 추가 시공에 따른 공사비 증가

- 야간 공사에 따른 부대공(교통신호수. 조명 등) 추가에 따른 공사비 증가

○ 공사비 산출현황

공 종	단위	수량	금 액(원)		증 · 감	비고
			당 초	변 경
포 장 공	식	1	178,916,525	545,628,237	증) 368,711,712
철 거 공	식	1	6,989,412	41,340,485	증) 34,351,053
부 대 공	식	1	0	25,427,000	증) 25,427,000
자 재 비	식	1	19,837,215	41,880,955	증) 22,043,740
소 계			203,743,152	654,276,657	증) 450,533,505
간접및부가세			90,520,143	303,919,391	증) 219,399,248
합 계			294,283,296	958,196,048	증) 663,932,753

※기존 공종은 낙찰율을 적용하고, 신규품목은 낙찰율(90.701%)을 적용함

Ⅴ		검 토 결 과

********************************************************************************************************************************.

Ⅵ		검토자 의견

**************************************************************************************************

****************************************************************************

따로붙임 : 상수관로 이설 실정보고 1부.  끝.