문서번호	정보통신보안담당관-27733
결재일자	2020. 12. 7.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	공공와이파이팀장	정보통신보안담당관
조재근	도찬구	12/07 공병엽

- 스마트서울 네트워크(S-Net) 1차 사업 -

강서구청 집행잔액 사용계획 검토보고

2020. 12

정보통신보안담당관

(공공와이파이팀)

- 스마트서울 네트워크(S-Net) 1차 사업 -

강서구청 집행잔액 사용계획 검토보고

S-Net 1차사업으로 강서구청에 재배정한 사업비 중 집행잔액을 이용한 강서구청의 설계변경 등 변경계획을 검토하여 조건부 승인코자 함.

Ⅰ		검토개요

□ 관련근거

○ 서울시-자치구 3차 합동회의 개최 (정보통신보안담당관-19790호/‘20.9.9)

○ 서울시-자치구 4차 합동회의 개최 (정보통신보안담당관-21134호/‘20.9.24)

○ S-Net 구축사업 낙찰차액 사용계획 제출 (정보통신과-14013호/‘20.10.15)

□ 추진방향

○ 4차선 이상 도로에 무선 AP 31개소 추가설치

○ S-Net 설계기준 적용 공공생활권 중심 끊김없는 와이파이 서비스 제공

○ 주택가 및 사적영역이 공공 와이파이 커버리지에 포함되지 않도록 재배치

□ 추진경과

○ ’20.03~05       : S-Net 구별 실시설계 완료

○ '20.05.27	: S-Net 자문위원회(제2차, 스마트정보지원센터, 9명)

- 와이파이6 BMT 결과보고, S-Net 1차 사업대상 자치구 선정(5개구)

○ '20.06.12	: S-Net 1차사업 자치구 선정(5개구)

○ '20.09.~12	.	: 공사․물품 사전절차 이행, 발주 및 계약

Ⅱ		사용계획

□ 사업계획                                            (단위 : 천원)

****	****	*****
		*	****	****
****	***	***	***	***
****	*****	*****	***	***
****	*****	*****	*****	***

************************                                         (단위 : 천원)

***	****	***	****	****	******
					*****	****	****
***	*****	*********	****************	*******	*******	*****	*******
***	*****	*********	****************	*******	*******	******	*******
*				*********	*******	******	*******

*********************************

(단위 : 천원)

****	****	****	****
******* ******** *****	********* *************** ***************	********************* **************** *****************	****

Ⅲ		검토의견

******************

○ 요청사항                                                     (단위 : 천원)

****	****	****	****
***** **********	********* *********	******************** *************** ***************	*********************************************************************************

***********

****************************************************

*******

********************************************************

**************************************

Ⅳ		행정사항

□ 물량 증감 상세내역, 설계서 등 감리를 통한 확인 : 강서구청

○ 물량 증감 상세내역, 설계서, 변경사유 등 감리를 통한 확인

□ 최종 설계변경 내역 제출	: 강서구청

붙임 : 낙찰차액 사용계획(강서구) 각1부.  끝.