문서번호	계약심사과-21364
결재일자	2019.12.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	토목심사2팀장	계약심사과장		재무국장
박홍	노형근	김수정		12/06 이병한
협 조

구로2동 주택가 공동주차장 건설 기본 및 실시설계 설계 경제성 심사(VE) 결과보고

2019. 12.

재  무  국

(계약심사과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	■	□	시설물 안전관리 검토
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

구로2동 주택가 공동주차장 건설 기본 및 실시설계

설계 경제성 심사(VE) 결과 보고

구로구청(도로과) 시행「구로2동 주택가 공동주차장 건설 기본 및 실시설계」에 대한 설계 경제성 심사(VE) 결과를 보고 드림

1		심사 요청 개요

□ 신청 부서 및 일자 : 구로구청 도로과(2019. 10. 4.)

□ 사업 내용

ㅇ 용  역  명 : 구로2동 주택가 공동주차장 건설 기본 및 실시설계

ㅇ 위    치 : 구로구 구로동 454-1번지 일원

ㅇ 주요내용 : 공동주차장(L=75.9m, B=38.6~11.3m)

- 부지면적 : 대지면적 3,842㎡, 연면적 4,279.48㎡

- 규    모 : 주차장 지하2층, 주차면 105면

ㅇ 총사업비 : 15,068백만원

ㅇ 사업기간 : ’18.07.~’22.06.

ㅇ 설계공정률 : 70%

2		심사 개요

□ 심사기간 : ’19. 10. 30. ～ ’19. 11. 25.(기간 중 3일)

□ 장      소 : 계약심사과 회의실 및 구로2동 사업부지

□ 전문가구성 : 11명(외부전문가 9명, 내부공무원 2명)

□ 심사내용

- 건설공사의 설계, 시공, 유지관리 등 경제성 분석

- 공사 시행의 적정성, 시설물 안전성 검토

- 시설물 안전 및 이용자 편의성 반영 등

3		심사 결과

① 성능향상 : 아이디어 66건을 제안하여 59건 채택【채택률 89.4%】

② 비용절감 : 공사비 15,068백만원에서 783백만원 절감【절감률 5.2%】

□ 설계VE 검토결과

- 유형별 제안건수 및 절감액

(단위: 건, 백만원)

	시공성 향상	건 수	14
		증감액	-773
	안전성 강화	건 수	7
		증감액	-41
	사용자편의성 향상	건 수	8
		증감액	22
	유지관리성	건 수	8
		증감액	4
	환경성	건 수	4
		증감액	5
	설계 보완	건 수	18
		증감액	-

- 비용절감 및 가치향상

(단위: 점, 백만원)

비 용(C)			성 능(P)			가 치(V=P/C)
공사비	절감액	절감률	원안	대안	개선율	원안	대안	향상률
15,068	783	5.2%	100	118.5	18.5%	100	123.3	23.3%

- 주요 대안내용

1)【시공성향상】흙막이 가시설 버팀보 간격을 확대조정하자 (버팀보 간격 2.0m → 3.0m이상 적용) ․ 절감액 : 304.6백만원 ⇒ 흙막이 가시설의 안정성을 확보되는 범위내의 버팀보 간격을 확대하여 예산절감 및 시공성을 향상시킴	↓

2)【안전성】소화용압력탱크를 변경하자 (압력식탱크 → 전자식 기동용 압력스위치) ․ 증가액 : 1.04백만원 ⇒ 성능시험 시 세팅이 용이하고 안전한 전자식 압력스위치로 변경하여 유지관리성 및 안전성을 향상시킴		→

3)【유지관리성】충압펌프를 웨스코에서 입형으로 변경하자 (웨스코 → 입형 충압펌프 변경) ․ 증가액 : 3.63백만원 ⇒ 충압펌프를 진동 및 소음이 적은 입형으로 변경하여 유지관리성을 향상시킴	↓

4		행정 사항

□ 설계경제성 심사 결과통보 : 구로구청 도로과

붙임 1. 설계 경제성 심사 제안 채택목록 1부.

2. 설계 경제성 심사 결과 보고서(별도) 1부.

3. 설계 경제성 심사 참여자 목록 1부.  끝.