문서번호	토목부-23867
결재일자	2020. 12. 8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
최승룡		최진우	12/08 김용제
협조

「세종대로 도로공간 재편사업(1구역)」

교통신호수 임금지급에 대한 검토보고

2020. 12.

도시기반시설본부

(토  목  부)

「세종대로 도로공간 재편사업(1구역)」

교통신호수 임금지급에 대한 검토보고

「세종대로 도로공간 재편사업」과 관련 계획부서(보행정책과)로 부터 공사중 교통소통대책으로 시행중인 교통신호수 비용지급 요청이 있어 이에 대한 검토 보고임.

Ⅰ		관련문서

❍ 교통신호수 임금지급 요청[보행정책과-14348호(‘20.11.02.), 15841호(’20.12.03.)]

❍ 교통신호수 비용지급 계획[보행정책과-15433호(‘20.11.26.), 도시교통실장 방침]

Ⅱ		사업개요

○ 규    모 : 차로축소(2~3차로), 보도확장 및 자전거도로 설치

- 판석포장 7,853㎡, 아스콘포장 15,670㎡, 보차도경계석 2,202m, 빗물받이 85개소, 선배수로 1,079m, 표지판신설 14개소

○ 사업기간 :‘20.07.16. ~‘20.12.31.

○ 도 급 비 : 6,422백만원

○ 시 공 사 : 국정종합건설(주) 외 2개사

○ 감 리 사 : 수성엔지니어링 외 1개사

Ⅲ		임금지급 요청현황

❍ 추진경위

- ‘20.11.02 : 교통신호수 비용(8월~10월) 지급요청(보행정책과-14348호)

- ‘20.11.04 : 교통신호수 비용지급 및 교통소통 조치 협조요청(보행정책과-14438호)

- ‘20.11.26 : 교통신호수 비용 지급계획 방침(도시교통실장, 보행정책과-15433호)

· 목    적 : 세종대로 공사 중 본선 및 우회도로의 교통소통 관리

· 배치계획 : 경찰심의, 공사 중 모니터링 결과에 따라 조정(22개 지점)

· 배치지점 : 5개 교차로(덕수궁, 시청역, 숭례문, 서울역, 동자 교차로)

· 지급단가 : 20,000원/시간[야간(19시 이후)은 50% 증액 적용]

· 지급부서 : 도시기반시설본부

- ‘20.12.03 : 교통신호수 비용(11월) 지급요청(보행정책과-15841호)

❍ 월별 근무 및 지급요청액 현황(세부현황 붙임)

(단위 : 천원)

******	******	******	******	*******	*******
******	***	**	***	***	***
****	******	****	****	****	****
*****	*******	******	******	******	******

❍ 문제점 및 대책

- 세종대로 공사 관련 교통신호수에 대한 비용 설계 미반영 됨.

※ 소요예산 관련부서(보행정책과)에 반영요청

- 관련부서(보행정책과) 확인결과 교통신호수 개인별 지급을 원하고 있으나 우리본부에서 직접 지급할 수 있는 방법이 없음.

※ 설계변경 후 도급자로 하여금 지급토록 업무지시

❍ 기타사항

- 도시안전건설위원회 위원장(성흠제) 면담결과(‘20.11.09)

· *********************************************************************************************

Ⅳ		조치의견

❍ 향후 모범운전자 종합적인 운영(단가, 비용지급, 예산편성 등)에 대한 근거와 설계에 미 반영된 교통신호수에 대한 비용을 반영토록 관련부서 (보행정책과)에 요청하고,

❍ 세종대로 공사관련 원활한 교통소통을 위하여 근무한(8월~11월) 교통 신호수에 대한 비용은 설계변경에 반영, 세종대로 1구역 도급자로 하여금 우선 지급토록 업무지시 하고자 함.

붙임  관련자료 1부.    끝.