의원 요구 자료 제출

시 행	교통정책과-21271
결재일자	2020. 12. 8.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	기획담당관

주무관		철도계획팀장	교통정책과장	교통기획관	도시교통실장	결재
김동천		이기웅	이창석	구종원	12/08 황보연
협 조

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 3725번, 최기상 의원, 법제사법위원회)

따로붙임 : 국회의원 요구자료 1부.  끝.

최기상 의원(법제사법위원회, 더불어민주당)

□ 요구번호 : 3725

1. 서울시 경전철 사업 추진 현황 관련

1) 서울시 경전철 사업 계획 확정 노선 추진 현황

2) 예비 및 추가 검토노선 현황

의원님이 요구하신 사항을 다음과 같이 제출합니다.

1) 서울시 경전철 사업 계획 확정 노선 추진현황

노선명

사업개요

추진현황

신림선

▫구  간 : 샛강~서울대입구

▫규  모 : 7.8㎞, 정거장 11개소

▫사업비 : 8,050억원

▫ ’09.11.	제3자 제안 공고

▫ ’10. 3.	우선협상대상자 지정

▫ ’16. 9.	실시계획 승인 / 공사 중(~’22년)

동북선

▫구  간 : 왕십리~상계역
▫규  모 : 13.34㎞, 정거장 16개소

▫사업비 : 1조 5,754억원

▫ ’09. 8.	민자적격성 조사 통과

▫ ’10. 5.	제3자 제안 공고

▫ ’10.10.	우선협상대상자 지정 / 협상 중 법정관리(’15.3.)

▫ ’15.12. 우선협상대상자 지정 해지 / 차순위 협상대상자 협상

▫ ’20. 1. 실시계획 승인 / 공사 중(~’25년)

9호선4단계

▫구  간 : 보훈병원~고덕강일1지구

▫규  모 : 3.8㎞, 정거장 4개소

▫사업비 : 5,592억원

▫ ’18. 5.	예비타당성 조사 통과

▫ ’20. 4. 기본계획 수립 / 실시설계 입찰 준비 중

위례선

▫구  간 : 마천역~복정역,우남지선

▫규  모 : 5.44㎞, 정거장 12개소

▫사업비 : 1,800억원

▫ ’18. 7.	민자적격성 조사(B/C 0.75)

▫ ’19. 5.	공공사업 전환 업무협약 체결

▫ ’20.10.	기본계획 수립 / 실시설계․공사 추진방안 검토 중

위례신사선

▫구  간 : 위례중앙~신사

▫규  모 : 14.83㎞, 정거장 11개소

▫사업비 : 1조 4,253억원

▫ ’18.10.	민자적격성 통과

▫ ’19. 7.	제3자 제안공고

▫ ’20. 1. 우선협상대상자 선정 / 협상 중

서부선

▫구  간 : 새절~서울대입구

▫규  모 : 16.15㎞, 정거장 16개소

▫사업비 : 1조 6,191억원

▫ ’17. 2.	민자제안서 접수

▫ ’20. 6.	민자적격성 조사 통과 / 제3자 제안공고 준비 중

목동선

▫구  간 : 신월동~당산역

▫규  모 : 10.87km / 12개소

▫사업비 : 9,392억원

▫ ’15. 6.	제1차 도시철도망 구축계획 변경 승인

▫ ’20.11.	제2차 도시철도망 구축계획 승인 /
예비타당성 조사 준비

※ 4개 노선은 2015년 제1차 도시철도망 구축계획(변경)에 민자사업으로 반영되었으나 그간 민자제안이 없어 사업이 추진되지 않음에 따라 사업실행력 제고를 위해 제2차 도시철도망 구축계획에 민자→재정사업으로 전환방안 제시

면목선

▫구  간 : 청량리~신내동

▫규  모 : 9.05km / 12개소

▫사업비 : 8,894억원

난곡선

▫구  간 : 보라매공원~난향동

▫규  모 : 4.13km / 5개소

▫사업비 : 3,912억원

우이신설 연장선

▫구  간 : 우이동~방학역

▫규  모 : 3.50km / 3개소

▫사업비 : 2,890억원

노선명	사업개요	추진현황
강북횡단선	▫구 간 : 청량리역 ~ 목동역 ▫규 모 : 25.72km / 19개소 ▫사업비 : 20,844억원	▫ ’20.11. 제2차 도시철도망 구축계획 승인 / 예비타당성 조사 준비
4호선 급행	▫구 간 : 당고개역 ~ 남태령역 ▫사업비 : 2,372억원	▫ ’20. 7. 사전타당성 조사 용역(~’21.5.) ▫ ’20.11. 제2차 도시철도망 구축계획 승인
5호선 직결	▫구 간 : 둔촌동역 ~ 굽은다리역 ▫사업비 : 2,678억원
서부선 남부연장	▫구 간 : 서울대입구역 ~ 서울대 정문 ▫규 모 : 1.72km / 1개소 ▫사업비 : 1,330억원	▫ ’20.11. 제2차 도시철도망 구축계획 승인 / 본선 민자사업자와 연장방안 협의
신림선 북부연장	▫구 간 : 샛강역 ~ 서부선 ▫규 모 : 0.34km / 1개소 ▫사업비 : 561억원

2) 예비 및 추가 검토노선 현황(제2차 도시철도망 구축계획 ‘후보노선’)

노선명	사업개요	추진현황
7호선 급행	▫구 간 : 장암역 ~ 부평구청역 ▫사업비 : 5,295억원	※「제2차 도시철도망 구축계획」 선정기준을 충족하지 못한 노선 중 향후 본선 추진여부, 주변여건 변화 등을 고려하여 검토 필요성이 있는 경우 향후 5년 단위 「제2차 도시철도망 구축계획」변경시 재검토하도록 ‘후보노선’으로 제시
난곡선 연장	▫구 간 : 난향동 ~ 금천구청역 ▫규 모 : 4.5km / 4개소 ▫사업비 : 3,655억원

. 끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (교통정책과)	담당사무관	이 기 웅
	☎2133-2241	주무관	김 동 천
	작 성 일 : 2020. 12