문서번호	도로보수과-11190
결재일자	2020. 12. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	도로보수과장	북부도로사업소장
황태선	이화신	12/08 고영준

『2020년 도로 및 교통부속물유지보수공사(연간단가)』 작업지시(5차) 완료 보고

2020. 12.

북부도로사업소

(도로보수과)

『2020년 도로및교통부속물 유지보수공사(연간단가)』

작업지시(5차) 완료 보고

우리사업소에서 시행중인 「2020년 도로 및 교통부속물 유지보수공사(연간단가)」와 관련 5차 작업지시 완료에 따른 검토 보고 임.

▢ 사업개요

∘ 공 사 명: 2020년 도로및교통부속물 유지보수공사(연간단가)

∘ 공사개요

- 도로및교통부속물 세척 : 11,000㎡

- 과속방지턱 도색       : 1000㎡

- 도로표지병 설치       : 1,260개

∘ 총공사비: *********

- 도급비: *********

- 관급비: ********

- 이전비: ********

∘ 도 급 자: **************

▢ 5차 작업완료 내용

∘ 작업기간: 2020. 11. 06. ~ 12. 07.

∘ 작업구간: 동소문로, 도봉로 등 16개 노선

공 종	정 비 물 량		증·감
	작업지시	작업완료
과속방지턱 도색	74.16㎡	74.16㎡	-
도로부속물 세척	5,654㎡	5,726.88㎡	증) 72.88㎡
무단횡단금지시설 설치 및 철거	389경간	388경간	감) 1경간
도로표지병 설치	900개소	910개소	증) 10개소
옹벽보수(단면보수)	2.68㎡	2.68㎡	-

∘ 세부작업내용

연번	노선	위치	공 종	정비물량		증·감
				당초	변경
1	자하문로	종로구 자하문로 서울미술관 옆	과속방지턱 도색	24.84	24.84	-
	창의문로	창의문로 윤동주문학관 등3개소		49.32	49.32	-
2	동소문로 등 6개 노선	동소문로 미아사거리~현대백화점 등 17개소	부속물(중앙분리대)세척	5,654	5,726.88	증)72.88㎡
3	덕릉로 등 7개 노선	노원구 중계역교차로~노해근린공원교차로 등 7개소	도로표지병 설치	900	910	증) 10개소
4	인수봉로	강북구 수유동 486-739	옹벽 보수 (단면보수)	2.68	2.68	-
5	자하문로	통인시장~자하문터널	무단횡단금지시설 설치	81	81	-
	노원로	상계중학교 주변		83	87	증) 4경간
	삼일대로	낙원상가~종로2가교차로		61	56	감) 5경간

∘ 예산집행현황

(단위: 천원)

구분	계약금액	전회 작업완료	5차 작업완료	잔 액	비 고
도급비	351,520	290,192	122,870	-61,542
관급비	72,930	31,263	-	41,667	관급비,이전비 잔액 56,262
이전비	24,000	9,405	-	14,595
합계	448,450	330,860	122,870	-5,280

※ 부족예산(5,280천원) 설계변경(정산)시 제경비로 정산

▢ 조치계획

∘ 『2020년 도로및교통부속물 유지보수공사(연간단가)』에 시공물량을 반영하여 설계변경하고자 함.

붙임  1. 작업완료보고서 1부.

2. 작업완료내역서 1부.  끝.