투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	설계변경 시행(제3회-최종)『2020년 남산 및 산하공원 공원시설물 유지보수공사(연간단가)』

1. 시설과-4947(2020.12.08.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 우리 사업소에서 시행중인『2020년 남산 및 산하공원 공원시설물 유지보수공사(연간단가)』에 대해 아래와 같이 설계변경(제3회-최종)하여 사업 추진에 만전을 기하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2020년 남산 및 산하공원 공원시설물 유지보수공사(연간단가)

나. 공사기간 : 2020. 3. 17. ~ 2020. 12. 24.

다*************************

라. 설계변경사유 : 작업지시 물량에 대해 현장여건 변동 발생으로 시공물량 증․감 발생

마. 설계변경 금액

(단위 : 원)

구 분		설계변경 금액			비고
		당 초	변 경	증 · 감
총 사업비		459,137,990	457,221,160	감) 1,916,830
도급비	공급가액	414,408,028	412,665,455	감) 1,742,573
	부가세	41,440,802	41,266,545	감) 174,257
	계	455,848,830	453,932,000	감) 1,916,830
관 급 비		3,289,160	3,289,160	0

바. 예산과목

- (기반기설유지보수) 남산의 입체적 개발을 통한 서울의 대표공원화, 남산 및 산하공원 운영, 남산 및 산하공원 보수정비사업, 남산 및 산하공원 시설물 보수정비, 시설비 ---- 441,721,160원

- (공용주차장개선비) 공원운영과,공원녹지 정책개발 및 만족도개선, 공원 유지관리 및 이용활성화, 공원유지관리 및 보수정비, 시설비(도시개발특별회계) --------- 15,500,000원

붙임 1. 설계변경 검토보고 1부.
2. 설계변경 내역서(제3회-최종) 1부.   끝.

	시설과장
★주무관	이승남		시설팀장	민경갑		시설과장	12/08 代민경갑
협조자	재무팀장	권소진
시행	시설과-4960	(		)	접수		(		)
우	04628	서울시 중구 삼일대로 231(예장동) 서울시중부공원녹지사업소 4층	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02-3783-5962	/전송	02-3783-5969	/	lsnam2003@seoul.go.kr	/	부분공개(5)