문서번호	공원시설과-5225
결재일자	2020. 12. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	공원시설과장	공원부장
현병철	최연호	12/08 代이정환

- 뚝섬 및 망원한강공원 자연(형)호안 복원 사업 전기공사 - 실정보고서(1회) 검토 보고

2020. 11.

한강사업본부

(공원시설과)

- 뚝섬 및 망원한강공원 자연(형)호안 복원사업 전기공사 -

실정보고서(1회) 검토 보고

우리본부에서 시행 중인「뚝섬 및 망원한강공원 자연(형)호안 복원사업 전기공사」의 감독기관(서울시설공단)에서 제출한 실정보고서 검토결과를 보고 드림.

□ 관련근거

○ 서울시설공단 공사감독3처-11520(2020.12.04.): 공사현장 실정보고서 승인 요청

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 뚝섬 및 망원한강공원 자연(형)호안 복원사업 전기공사

○ 위    치 : 뚝섬 및 망원한강공원

○ 공사기간 : *************************

○ 도 급 비 : ***********

○ 도 급 자 : ************

○ 감독기관 : **************

□ 실정보고 내용

○ 현장 실정사항

구분	현황 및 문제점	검토결과	공사비
투광등 이설	▶ 공원등 추가 이설 및 2-62 ~ 2-63 구간 배관 배선 노후로 인한 교체로 공사 물량 변경	▶ 현장여건에 맞게 공원등 3개 이설 및 노후 관로 교체 후 설계변경시 반영	증 18,940천원

※ 상기내용 중 시공 시 현장상황 등에 따라 발생하는 일부 경미한 변경사항은 설계변경시 반영

□ 검토의견

○ 현장여건을 고려하여 노후 관로 교체 및 기존 공원등 이설 등을 변경하는 건으로 적정한 것으로 사료됨.

○ 금년도 예산범위 내 1차 설계변경하고 나머지 물량에 대해서는 내년도 예산 확보 후 변경 조치

- 총 증가 예산 : 18,940천원

- 1차 변경 : 9,931천원

□ 조치계획

○ 시설공단에서 제출한 실정보고서에 대해서는 우선 낙찰차액 활용하여 변경하고 잔여 변경사항에 대해서는 내년도 예산 활용하여 설계변경 하도록 승인하며 공사의 시급성을 감안, 우선 시공 조치하고 향후 설계변경 시에 반영토록 시설공단에 승인 통보

붙임 1. 공사현장 실정보고서 승인 요청 공문 1부.

2. 실정사항 검토내용 1부.  끝.