문서번호	시설관리과-24084
결재일자	2020. 12. 8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
김재현		양창진	12/08 유명은
협 조

『유량계 신설 전기설비 공사』

설계변경 검토보고

2020. 12.

강서수도사업소

〔시설관리과〕

『유량계 신설 전기설비 공사』

설계변경 검토보고

우리사업소에서 시행 중인「유량계 신설 전기설비 공사」의 신규공종 및 계약물량 증감 발생에 따른 설계변경 및 심의위원회 개최 계획을 보고 드림

Ⅰ	계약현황

○ 공  사  명: 유량계 신설 전기설비 공사

○ 공사기간: 2020. 11. 23. ～ 12. 22.

○ 계약금액: ***********************

○ 계약상대자: ****************

○ 공사규모

- 중블록 유량계 3개소 신설에 따른 전기인입 공사

- 전력공급용 배관·배선 설치 공사 등

Ⅱ	설계변경 근거

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 법률 시행령 제74조

- 설계변경으로 인한 계약금액의 조정

○ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(행정안전부 예규 39호, 2018.07.09.)

- 제13장 공사계약 일반조건 제6절 공사 설계의 변경 및 제7절 계약금액의 조정

Ⅲ	설계변경 검토내역

○ 설계변경 사유

- 유량계실 위치 변경 등에 따른 신규공종 및 시공물량 증·감 발생

- 미집행 보험료(건강, 연금 등) 정산(감액) 시행

○ 설계변경 금액

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
계약금액	************	************	감)2,760,500	-

○ 시공물량(상세내역 별첨)

구 분	공 종	비 고
물량 감소	파상형경질폴리에틸렌전선관(ELP 30mm) 등 6개
물량 증가	난연케이블(0.6/1kv F-CV 2C×10㎟) 등 5개
신규 공종	제어용케이블(F-CVV SB 3C×2.5㎟ 2열) 등 5개

Ⅳ	설계변경 심의위원회 개최

○ 일    시 : 2020. 12. 9(수) 10:00

○ 장    소 : 사업소 4층 회의실

○ 심의내용 : 설계변경 타당성 검토

○ 심의의원

- 위원장 : 시설관리과장

- 위  원 : 시설운영팀장, 시설안전팀장, 기전팀장외 6급 주무관 1명

- 간  사 : 공업7급 김재현

Ⅴ	행정사항

○ 설계변경 심의위원회 개최 후 심의결과에 따라 설계변경 시행.

붙 임 : 1. 설계변경 내역서 1부

2. 물량증감 및 신규공종 현황 1부

3. 설계변경 심의 결과서(서식) 1부

4. 검증확인서 1부.  끝.