문서번호	치수과-19633
결재일자	2020.12.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

주무관		하수계획팀장		치수과장		안전건설교통국장
허승호		김경원		민병기		12/07 손경철
협조
	재무과장		이경생
	계약팀장		이은술

★ ◉

「2020년 하수사업 건설폐기물 처리용역」

설계변경(정산) 시행 검토보고

2020. 12.

성   동   구

(치 수 과)

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 ☑ 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 □ 공약(약속)사업 □ 계속사업 □ 인센티브/공모사업 □
소통분야 고려사항		●	구민		:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	전문가		:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	이해당사자		:		유 □ ( ) 무 ☑
여성친화 도시		성 평 등 □ 안 전·편 의 □ 가 족 · 공 동 체 회 복 □ 여 성 참 여 □
기타 고려사항		일 자 리 □ 환경영향 □ 안 전 ☑ 유지비용 ☑ 바른 공공언어 □
		성 인 지 □ 취약계층 □ 장 애 인 □ 디 자 인 □ 갈등발생 요인 □
타자원 활용		●	중앙부처	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	서울시	:		유 ☑ ( 시비 재배정사업 ) 무 □
		●	기업	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	민간단체	:		유 □ ( ) 무 ☑
언론홍보 계획		기획보도 □ 보도자료 □ SDTV □ 성동뉴스레터 □ 성동구소식지 □
		기 고 문 □ 전자행정서비스 □ S N S □ 기타 (리플릿 등) □ 없 음 ☑
	● 홍 보 제 목 :
	● 중점 홍보사항 - -
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

「2020년 하수사업 건설폐기물 처리용역」

설계변경(정산) 검토 보고

우리 구에서 시행중인 『2020년 하수사업 건설폐기물 처리용역』 의 건설폐기물 처리물량 증·감 등에 대하여 아래와 같이 설계변경 시행코자 함.

Ⅰ		용역개요

○ 용 역 명: 2020년 하수사업 건설폐기물 처리용역

○ 사업기간: 2020. 3. 13. ~ 2020. 12. 31.

○ 사업규모: 건설폐기물 운반 2,839㎥, 건설폐기물 처리 6,564톤

○ 도 급 자: ㈜인광씨앤티(대표 김형진), ㈜이도 (대표 최정훈)

○ 도 급 비: 198,532,750원

Ⅱ		설계변경 사유

○ 현장별 건설폐기물 운반 · 처리물량 증감에 따른 물량 변경

○ 처리대상 공사장 추가

- 설계변경 시행 검토 보고(송정빗물펌프장 유입관로 보수보강공사)[치수과-18973호(2020. 11. 25.)]

Ⅲ		설계변경 내역

○ 물량변경 내역

구 분	운 반(㎡)				처 리(톤)				비 고
	당 초	변 경	증․ 감		당 초	변 경	증ㆍ 감
폐콘크리트	2,051	2,432	중)	381	4,717	5,596	증)	879
폐아스팔트	480	791	증)	311	1,128	1,859	증)	731
폐아스팔트(재생)	307	301	감)	6	719	707	감)	12
합계	2,839	3,524	증)	686	6,564	8,162	증)	1,598

○ 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 ㆍ 감
총 용역비		198,532,750	250,071,000	증 51,538,250
도급비	공급가액	180,484,318	227,337,273	증 48,852,955
	부가세	18,048,432	22,733,727	증 4,685,295
	계	198,532,750	250,071,000	증 51,538,250

Ⅳ		조치의견

○ 상기 내용과 같이 시공방법 및 물량 증·감 등에 대하여 설계변경 시행하고자 함.

붙  임: 1. 설계변경서 1부.

2. 설계변경 시행 검토 보고(송정빗물펌프장 유입관로 보수보강 공사) 1부.  끝.