문서번호	공원시설과-5235
결재일자	2020. 12. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	공원시설과장	공원부장		한강사업본부장
이병철	최연호	김인숙		12/09 신용목
협 조
	총무과장		이상이
	기획예산과장		문영일

『광나루 잠원수영장 노후 상수관로 교체공사』

설계변경(1회) 및 준공기한 연기보고

2020.12.

한강사업본부

(공원시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	■	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	□
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

『광나루 잠원수영장 노후 상수관로 교체공사』

설계변경(1회) 및 준공기한 연기보고

우리 본부에서 시행중인 『광나루 잠원수영장 노후 상수관로 교체공사』에 대하여 광나루 수영장 노후수조 방수에 따른 신규공종을 반영한 설계변경 및 준공기한을 연기하고자 보고 함.

※ 서울시설공단 공사감독1처-8527(2020.12.7.) 호와 관련임

공사개요

○ 공 사 명 : 광나루 잠원수영장 노후상수관로 교체공사

○ 위    치 : 광나루, 잠원 수영장

○ 공사기간 : (총차) 2020. 7.6. ~ 2021. 5.31.

(1 차) 2020. 7.6. ~ 2020.12.31.

○ 총공사비 : (총차) 3,530,390,360원

- 도급비2,138,853,400원, 관급비 559,800,000원, 이전비 831,736,960원

(1 차) 2,830,390,360원

- 도급비2,005,125,400원, 관급비 424,000,000원, 이전비 401,264,960원

설계변경 내용

○ 계약금액 변경(총차)

구 분	당 초	변 경	증감
총 공 사 비	3,530,390,360	3,530,390,360	-
도 급 비	2,138,853,400	2,717,846,000	증) 578,992,600
관 급 비	559,800,000	453,330,000	감) 106,470,000
이 전 비	831,736,960	359,214,360	감) 472,522,600

○ 계약금액 변경(1차)

구 분	당 초	변 경	증감
총 공 사 비	2,830,390,360	2,830,390,360	-
도 급 비	2,005,125,400	2,377,060,360	증) 371,934,960
관 급 비	424,000,000	453,330,000	증) 29,330,000
이 전 비	401,264,960	-	감) 401,264,960

○ 주요 변경내용

- 광나루 수영장 수조 노후타일 제거 및 방수방식 시행

공종	규격	단위	수량		증 감	비고
			변경전	변경후
타일제거		㎡	-	1,814	증 1,814	증 67백만원
방수방식 (SUP패널)	400×400×50T	㎡	-	1,814	증 1,814	증512백만원
계						증579백만원

준공기한 연장

○ 준공기한 연장 : (총차) 변경없음

(1 차) 2020.12.31 ⇒  2021. 4. 30.

○ 연장사유 : 광나루 수영장 추가공사로 인한 절대공기 부족

조치의견

○ 위와 같이 광나루 노후수조 방수에 따른 신규공정을 반영한 설계변경 및 준공기한 연기를 시행하여 공사추진에 철저를 기하고자 함.

붙임  1. 설계변경 관련 서류 1부.

2. 준공기한 연기관련서류 1부.

3. 설계변경심사결과 1부.

4. 관련 보고서 1부.  끝.