문서번호	설비부-19752
결재일자	2020. 12. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		환경설비과장	설비부장
김문호		김오열	12/09 이달영
협 조

『시립동대문 실버케에센터 건립 전기공사』

설계변경(총차2회, 2차1회) 검토 보고

2020. 12.

도시기반시설본부

( 설 비 부 )

『시립동대문 실버케어센터 건립 전기공사』

설계변경(총차2회, 2차1회) 검토 보고

위 공사와 관련하여 사업의뢰부서(어르신복지과) 요청사항인 바닥난방 설비 반영 및 물가변동에 따른 계약금액 증가, 선행공종 지연에 따른 계약기간 연장에 대해 검토 후 보고 드림.

***************************************************

***************************************************

************************************************************

Ⅰ		관 련 근 거

◌ 「공사계약일반조건」제19조(설계변경 등)

◌ 설계변경 소위원회 자문회의 조치결과 보고 및 설계변경(총차2회, 2차1회) 검토 보고

- PC20(동대문 실버케어)-455(2020. 12. 8.)호

Ⅱ		공 사 개 요

◌ 공 사 명: 시립동대문 실버케어센터 건립 전기공사

◌ 공사위치: 서울시 동대문구 답십리동 553외 1

◌ 공사내용: 지하1층/지상4층, 연면적 2,990.95m2, 노유자시설

- 주요설비: 수배전반설비(400kVA), 전등 및 전열설비, 태양광발전설비, 전력 및 조명제어 설비 등

****************************************************

*********************************************

******************************

***********************

********************

Ⅲ		실정보고 내용

□ 검토목적

◌ 사업의뢰부서(어르신복지과)의 요청사항인 바닥난방 설비 반영을 위한 설계변경 소위원회 개최 후 자문의견 검토, 물가변동으로 인한 계약금액 보고서 검토

◌ 선행공정(건축)의 공사기간 연장에 따른 전기공사 계약기간 연장 검토

□ 계약금액 변경

◌ 설계변경 소위원회 자문회의 결과 반영(조건부 가결)

(단위: 원)

계약금액	자문요청금액	심의결과 절감액	최종 반영금액
***********	*********** ***************	**********	*********** ***************

◌ 자문위원 검토의견 반영사항

- 케이블트레이 단가 조정 및 물량 수정

- 점검구 BOX 설치 공량 수정, 케이블지지대 공량 산출 삭제

- 고용개선지원비 중 사회보험료 및 고용개선 장려금 삭제(조례개정 전)

- 케이블트레이 규격 계산서 및 변압기 용량산출 근거 첨부 등

◌ 주요 물량 증감내역

공 종	품 목	단위	당 초	변 경	증 · 감
**********	*****	*	*	*	**	*
*******	********	*	**	***	**	***
*******	********	*	*	***	**	***
******	**********	*	**	***	**	**
*********	*******	*	*****	*****	**	***
***********	**********	*	***	*****	**	*****
******	******	*	*	**	**	**
**********	*********	*	*	***	**	***
***********	***********	*	*	***	**	***
******	*********	*	*	***	**	***
******	*********	*	*	**	**	**

□ 공종별 증․감 내역

(단위: 원)

품 명	총차내역	1차(준공)	2차 내역
			변경 전	변경 후	증 · 감
**************	*********	*	*********	*********	*
************	**********	*******	**********	**********	*
**********	**********	**********	**********	**********	***********
**********	**********	**********	**********	**********	*
**********	**********	**********	**********	**********	*
*************	**********	*	**********	**********	***********
******************	**********	*********	*********	*********	*
**************	*********	*	*********	*********	*
****************	**********	**********	*********	*********	*
**************	**********	*	*********	**********	***********

□ 공사비 증감 현황

(단위: 원)

구분	공종	당 초	변 경	증・감			비 고
**	***	**********	**********	**		*********
	***	***********	***********	**		**********
	*********	**********	**********	**		*********
	*****	**********	**********	**		*********
	***	**********	**********	**		*********
	*****	*	*********	**		*********
	*****	**********	**********	**		*********
	*******	*	**********	**		**********
	********	*	**********	**		**********
	*****	***********	***********	**		***********
**	***	**********	**********	**	*********
	***	***********	***********	**	**********
	*********	**********	**********	**	*********
	*****	**********	**********	**	*********
	***	**********	**********	**	*********
	*****	*	*********	**	*********
	*****	**********	**********	**	*********
	*******	*	**********	**	**********
	********	*	**********	**	**********
	*****	***********	***********	**	***********

□ 공사기간 변경

◌ 공사기간 변경 현황

구 분	당 초	변 경	증·감
***	**********************	*********************	******
***	*********************	********************	*

◌ 연장사유

- 선행공정(건축공사) 연장에 따른 후속공정(전기공사) 연장

□ 건설사업관리기술자 검토의견

***********************************************************************************************************************************************************

Ⅳ		보고자 의견

*****************************************************************************************************************************************

붙임  건설사업관리단 검토 보고 1부.  끝.