투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	2020년 불광천/홍제천 차집관거 보수공사 실정보고(1회) 승인통보

1. 공사감독1처-8252(2020.11.30.)호와 관련입니다.

2. 『2020년 불광천/홍제천 차집관거 보수공사(사각)』과 관련하여 실정보고(1회)를 승인하오니 관련 업무에 참고하여 주시기 바라며,

3. 우리센터로 검토요청하신 내용에 대하여 아래와 같이 회신 하오니 추후 설계변경시 참고하여 주시기 바랍니다.

가. 검토내용

- 보수공법 : KRCD공법(기존 계약 체결된 공법)

- 천정, 벽체 보수두께 : T=30mm

- 바닥 보수두께 : T=50mm ~ T=80mm(노후화등을 감안하여 설계변경 추진)

- 공사기간 연장 : 서울시설 공단에서 공정표등을 감안하여 금회 설계변경시 요청하면 계약변경 추진예정임

붙임 : 관련서류 1부(별도 송부).  끝.

	서울특별시난지물재생센터소장
주무관	김승조		시설팀장	우배용		시설보수과장	12/09 조선행
협조자
시행	시설보수과-4440	(		)	접수		(		)
우	10542	경기도 고양시 덕양구 426 난지물재생센터 시설보수과	/
전화	02-300-8558	/전송	02-300-8587	/	ksjseoul@seoul.go.kr	/	대시민공개