문서번호	생태환경과-4474
결재일자	2020. 12. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		생태환경과장	공원부장
장창수		이정환	12/09 김인숙
협조
	주무관		박웅교

- 뚝섬·망원한강공원 자연(형)호안 복원사업 - 공사현장 실정보고(조경/2회)에 대한 검토보고

2020. 12

생태환경과

- 뚝섬·망원한강공원 자연(형)호안 복원사업 -

공사현장 실정보고(조경/2회)에 대한 검토보고

한강의 자연성을 회복하기 위하여 시행중인「뚝섬·망원한강공원 자연(형)호안 복원사업」과 관련하여 서울시설공단의 공사현장 실정보고(조경/2회)에 대하여 아래와 같이 검토하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

▢ 공사개요

○ 공 사 명 : 뚝섬·망원한강공원 자연(형)호안 복원사업

○ 공사기간 : 2020. 04. 01 ~ 2021. 11. 30

○ 공사내용 : 자연형 호안 복원, 수변식생대 개선, 수목식재 등

○ 도 급 비 : 3,183,515,830원(토목 : 2,744,827,349원, 조경 : 438,688,481원)

○ 도 급 자 : 주계약자 공동도급

┍ 주계약자(토목) : 을묘종합건설(주) 대표 임주현

┗ 부계약자(조경) : (주)뜨레엔지니어링 대표 이상님

○ 공사감독 : 서울시설공단(공사감독3처)

▢ 실정보고 및 승인여부

구 분	실정보고 내용	검토결과	비 고
[뚝 섬] 식재공사	○ 신설되는 자전거도로와 산책로 주변 미관불량	○ ****************** ******************* ********************************* ************************	승 인
	○ 현장내 수형 불량목, 쇠약목 등 제거 수목 및 기존 적치된 임목폐기물 처리 필요	○ *************** ************************* ****************************** ****************************

구 분	실정보고 내용	검토결과	비 고
[망 원] 식재공사	○ 공사 대상지 기존수목으로 인하여 작업로개설 및 토공작업 등 후속 공정작업 어려움	○ ***************** ***** ************************ ************************ ************************ ***************************	승 인

▢ 개략공사비

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 감			비고
				전 체	금 회	전 회
도 급 비	*****	***********	***********	*************	************	************
	****	***********	***********	*************	************	************
	*****	**********	**********	************	***********	***********

○ 예산과목 : 한강공원이용 및 생태환경 개선, 한강 자연성 회복, 자연(형) 호안 복원, 시설비 및 부대비, 시설비

▢ 보고자 검토의견

○ ***************************************************************

붙임 : 1. 공사현장 실정보고 승인요청 공문 1부.

2. 공사현장 실정보고 검토보고서(서울시설공단) 1부.

3. 계략공사비 1부.

4. 임목폐기물 수량산출서 1부.  끝.