문서번호	시설과-4986
결재일자	2020. 12. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	기전팀장	시설과장
김민주	김석광	12/09 代민경갑

『2020년 CCTV시스템 유지보수공사(연간단가)』 설계변경(정산) 계획

2020. 12.

중부공원녹지사업소

(시설과)

『2020년 CCTV시스템 유지보수공사(연간단가)』

설계변경(정산) 계획보고

「2020년 CCTV시스템 유지보수공사(연간단가)」의 작업물량

변경으로 인한 최종 설계변경사항을 아래와 같이 보고합니다.

□ 공사개요

❍ 공 사 명 : 2020년 CCTV시스템 유지보수공사(연간단가)

*****************************

****************************

❍ 계약일자 : 2020.  3. 4.

❍ 착공일자 : 2020.  3. 5.

❍ 준공기한 : 2020. 12.31.

□ 설계변경 주요사유

❍ 남산 및 산하공원 CCTV 일상 유지보수 중 작업 물량 변경

□ 설계변경 내용

❍ 설계변경 금액

(단위 : 원)

구 분		변경전	변경후	증 감	비고
도급비	공급금액	금23,830,600원	금23,830,600원	-
	부가가치세	금2,383,060원	금2,383,060원	-
	계	금26,213,660원	금26,213,660원	-

❍ 예산과목 : 남산 및 산하공원 보수정비 사업, 남산 및 산하공원 보수정비, 시설비

□ 보고자의견

❍ 위 상기 변경사항에 대하여 설계변경(정산)계약 시행하고자 함.

붙임  1. 설계변경 내역서 1부.
2. 검증확인서 1부.  끝.