문서번호	기전과-10161
결재일자	2020. 12. 9.
공개여부	부분공개(5 7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
이성도		12/09 서승완
협조

『영등포1-3재정비촉진구역』

실정보고(설계변경)에 대한 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 12.

강서도로사업소

(기전과)

『영등포1-3재정비촉진구역』

실정보고(설계변경)에 대한 검토보고

우리사업소에서 승인한 교통안전시설(신호) 원인자부담공사와 관련    실정보고(설계변경) 승인요청이 제출되었기에 검토보고 드림.

Ⅰ		관 련 근 거

교통관리과-26919(2019.10.25.)호 및 –19526(2020.9.24.)호

제2020-1200(2020.11.16)호

대영전기감GE 20C-12-11(2020.12.08.)호

Ⅱ		공 사 개 요

공 사 명 : 영등포1-3재정비촉진지구 지하철 출입구 교통안전시설물 설치공사

원 인 자 : 영등포1-3재정비촉진구역 도시환경정비사업조합

공사기간 : 2020.01.20. ~ 2020. 12. 31.

공사장소 : 영등포시장역 2번 출입구 주변(영등포동7가 31-1)

공사개요 : 신호기 신·이설 및 지주통합(신호+가로등)

관련업체 및 주요설치 내용

구 분	설 계	감 리	시공업체	승인주요내용
신호기	㈜태영알앤디	대영유비텍㈜	㈜수호건설	지주 신설 및 이설 신호등 신설, 이설, 철거 음향신호기 신설

특이사항 : 신호기 이설 후 원상복구 등의 단계별 공사임

Ⅲ		감리사 실정보고 내용

보고내용

- 설계사 및 시공사 변경

- 설계 변경(물량 변경) 및 공사기간 연장

설계변경 사유

- 규제 변경(신호기 이설 및 원상복구 → 신호기 신설 및 이설)

설계사 및 시공사 변경내용

구분	변경내용		비고
	변경전	변경후
설계사	㈜태영알앤디	대영유비텍(주)
시공사	㈜수호건설	우진신호㈜

설계변경 상세내용                                      (단위 : 원)

구분		변경내용		증감액	비고
		변경전	변경후
	총공사비	***********	***********	**********
도급비	공급가액	***********	***********	**********
	부가가치세	**********	**********	*********
	계	***********	***********	**********

공사기간 변경내용

- 변경 전 : ‘20년 1월 20일 ~ ’20년 12월 31일

- 변경 후 : ‘20년 1월 20일 ~ ’21년 06월 30일

Ⅳ		검 토 결 과

감리사 실정보고에 대하여 승인하고자 함

Ⅴ		행 정 사 항

감리용역비 추가 부과 요청(교통운영과)

원인자 및 유관기관(업체) 승인통보

붙임 1. 승인요청 및 감리사 실정보고서 1부.

2. 설계변경내역서 및 설계도면(변경전후) 1부.  끝.