문서번호	방재시설부-17392
결재일자	2020. 12. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		조경시설과장	방재시설부장
윤정환		온수진	12/09 박홍봉
협 조

『세종대로 도로공간 재편사업(1구역)』

조경공사(수목·시설물) 실정사항 검토 보고

2020. 12.

도시기반시설본부

(방재시설부)

『세종대로 도로공간 재편사업(1구역)』

조경공사(수목·시설물) 실정보고 검토보고

「세종대로 도로공간 재편사업」책임사업관리기술인으로부터 조경공사

(수목·시설물) 변경에 대한 실정보 사항이 있어 검토하여 보고 드림

[관련공문 : 세종수 제2020-154호(2020.12.8.)]

Ⅰ		공사개요

○ 사 업 명 : 세종대로 도로공간 재편사업

○ 위    치 : 세종대로 사거리 ~ 서울역 교차로

○ 규    모 : 보행친화공간 L=1.55㎞(양방향 8~12 → 6~9차로)

- 사업내용 : 보행로,자전거도로,가로숲‧녹지조성,편의시설 설치 등

○ 공사기간 : 2020.7. 16. ~ 12. 31.

○ 도 급 비 : 1구역 6,423백만원(1구역 조경: 1,287백만원)

○ 도 급 사 : 국정종합건설(1구역)(1구역 조경시공사: 건탑산업개발)

Ⅱ		실정보고

○ 추진경위

- ’19.11.29. : 기본 및 실시설계 용역준공(보행정책과)

-  ’20.04.02. : 시장 보고(보행정책과: 서울의 대표 보행길 조성 지시)

-  ’20.04.29. : 조경설계 예산확보(보행정책과)

-  ’20.08.24. : 세종대로 가로숲 실시설계 추진 지시(방재시설부 → 감리단)

-  ’20.11.12. : 조경분야 실시설계에 따른 실정보고 지시(방재시설부 → 감리단)

-  ’20.12.08. : 세종대로(1구역) 조경분야 실정보고(감리단 → 방재시설부)

○ 주요내용

- 가로숲 교목식재

□세종대로 도로공간 재편사업의 숲길 조성에 따른 식재수목 변경

※ 확장보도 내외부의 여건을 고려한 교목식재(느티나무 등 276주)

- 식재지 기반조성

□녹지대 수목생육을 위한 양질토사 치환 및 기반시설 추가(플랜터 등)

○ 도급비 승인요청

(단위 : 천원)

구 분	단위	당 초		변 경		증․감
		수 량	금 액	수 량	금 액
조경공(ⅰ)	식	1	3,797,635	-	-	감)3,797,635
2. 조경공(ⅱ)	식	1	932,843,755	-	-	감)932,843,755
3. 기존포장철거 등	㎡	-	-	1,109	99,605,838	증)99,605,838
4. 식재공	식	-	-	1	804,748,461	증)804,748,461
5. 시설물공	식	-	-	1	205,967,795	증)205,967,795
6. 포장공	식	-	-	1	234,783,182	증)234,783,182
제경비			233,485,647		420,928,630	증)187,442,983
공급가액			1,170,127,037		1,766,033,906	증)595,906,869
부가가치세			117,012,703		176,603,390	증)59,590,687
총공사비			1,287,139,740		1,942,637,296	증)655,497,556

Ⅲ		검토보고

○ 조경공사 변경개요

- 새로운 광화문광장과 서울로 7017을 연결하는 사람숲길 조성

□광화문광장 설계공모 당선자(CA조경) 가로숲 개념으로 재디자인

- 구간 내 거점공간과 자전거도로 병행설치에 따른 선택과 집중

□보도확장, 지하 및 주변 지장물 여건을 고려한 비움과 가로숲 특화 시행

- 녹지대 및 지하부 지장물 매설구간 식재기반 조성

□양토치환, 플랜터 설치로 교목식재 유효토심(60~120㎝) 확보

- 판석포장 경계부 스틸엣지 설치

□기능 : 포장지역과 녹지대 경계구분 및 재료분리, 양질토사 보존

□물량 : 1,791m

○ 보도 화강석 판석 재포장

- 보도확장 및 기본보도 구간 녹지조성 후 포장지역 마감처리

□사유 : 2021년 봄철 식재 시 기본보도 철거 후 판석 재설치

□물량 : 기존포장 철거 1,109㎡

○ 덕수궁 담장 주변 양버즘나무 정비

- 담장 옆 양버즘 정비로 시민안전 확보 및 문화재(덕수궁 담장) 보호

□정비대상 : 양버즘나무 22주, 은행나무 4주

	⇨
덕수궁 담장 주변 버즘나무 현황		버즘나무 정비 후 덕수궁 담장 전경

○ 설계변경 적용

- 상기 사유로 설계변경하여 시공하되 신규비목은 협의단가(강제협의율) 94.147% 적용[낙찰율(88.295%)+100%]/2

□□시공자의 책임없는 사유에 해당□설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가와

동단가에 낙찰율을 곱한 금액을 합한 금액의 100분의 50

- 덕수궁 주변 수목정비를 위한 담장 강관비계 설치와 수목정비 관련된 신규비목은 작업의 난도를 고려하여 협의단가 99% 적용으로 협의

Ⅳ		보고자 의견

○ 세종대로 도로공간 재편사업의 조경공사 변경에 대한 책임건설사업관리기술자의 실정사항 의견서를 검토한 바

○ 세종대로 사람숲길 조성을 위한 다층구조의 수목식재 개념을 구현하기 위해 식재기반을 조성하고 지장물 등 식재토심 확보를 위한 플랜터 설치 등 실정사항이 타당하다고 판단되어 제출한 실정보고는 승인조치하고

○ 변경에 따른 공사비 증가분은 추후 조경공사 설계변경 소위원회 심의를 받아서 그 결과를 설계변경 시 반영하도록 책임건설사업관리기술인에게 통보하고자 함

붙임 : 1. 세종대로 도로공사 재편사업(1구역) 실정보고서 1부.

2. 변경도면 1부(대용량으로 따로 붙임).

3. 지장물 현황사진 1부.  끝.