문서번호	교통운영과-18882
결재일자	2020. 12. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		교통개선팀장	교통운영과장
이현정		유양현	12/04 강진동
협조
	교통전문관		박평근

2020년 도로교통 소통개선 기본 및 실시설계 용역 설계변경(정산) 검토

『2020년 도로교통 소통개선 기본 및 실시설계 용역 』

설계 변경(정산) 검토 보고

2020. 12.

도시교통실

(교통운영과)

『2020년 도로교통 소통개선 기본 및 실시설계 용역 』

설계 변경(정산) 검토 보고

교통안전시설 심의 및 민원 등에 의해 교통소통개선 대상(위치) 및 물량이 변경됨에 따라 설계 변경을 검토하고 보고 드림.

▢ 관련근거

○ 계약 체결 통보 **********************

○ 설계변경 요청 **************************************

▢ 용역개요

○ 용 역 명: 2020년 도로교통 소통개선 기본 및 실시설계 용역

○ 용역기간: *************************

○ 용역규모: ***********************

○ 계약금액: **************

○ 계 약 자: *********************

▢ 변경사유

○ 교통안전시설 심의, 유관기관과의 협의(구청, 서울지방경찰청 등), 교통 민원 발생 등에 따른 설계 지점 및 물량 변경

- 물량변경

구분	당초	변경	증·감
***	**	*	****
****	**	**	****
****	**	**	****
****	*	*	*

▢ 설계변경 내역

구 분	용 역 비		증․감	비 고
	당 초	변 경
공급가액	***********	***********	************
부가가치세	**********	**********	************
총용역비	***********	***********	************

▢ 조치 계획

○ 위 변경 내역과 같이 변경 조치하여 사업시행에 만전을 기하고자 함

○ 예산과목(교통사업특별회계)

- 도시교통 체계 및 소통 개선, 교통소통 및 안전관리강화, 도로교통소통개선, 시설비(401-01)

붙임 : 1. 내역서 1부.

2. 공문 1부.  끝.