문서번호	기반시설과-4873
결재일자	2020. 12. 4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
양정훈		라철흠	12/04 전영주
협 조

『2020년 한강공원 진·출입시설 유지보수 공사 (연간단가)』 설계변경(2차) 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

한강사업본부

(기반시설과)

『2020년 한강공원 진·출입시설 유지보수 공사(연간단가)』

설계변경(2차) 보고

「2020년 한강공원 진·출입시설 유지보수 공사(연간단가)」의 설계변경(2차)을 시행하여 원할한 사업추진

1		공사개요

○ 공 사 명 : 2020년 한강공원 진·출입시설 유지보수 공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2020. 3. 9 ~ 2019. 12. 20

○ 계약금액 : 350,000천원

○ 계약상대자 : 단야공영㈜ 대표 김은숙

○ 공사규모

- 진·출입시설 보수 : 데크보수 384㎡, 조류방지망 설치 483㎡, 철재면 재도장 160㎡, 오일스텐칠 1,610㎡, 가드레일 정비 150경간, 보행자계단 설치 32m

2		설계변경 사항

○ 설계변경 근거

- 기반시설과-4222(2020.11.3.): 재난기금 사용에 따른 실정보고

- 기반시설과-4307(2020.11.9.): 적환장 도로설치에 따른 실정보고

○ 변경 사유 : 신규공종 및 물량 증·감 사항 반영

- 한강침수로 파손된 석재판으로 인해 시민불편을 초래하고 있으며 어린이 등 노약자가 위험에 노출되어 안전사고 사전예방 위한 석재판 정비

- 한강공원에서 발생되는 폐기물을 난지 적환장으로 원활히 수송하기 위하여 운영부 환경수질과에서 “폐기물 수송 전용도로 포장” 의뢰

- 기타 민원처리에 따른 소소한 물량 변경

○ 신규비목(아스콘 포장 등) 협의율 93.372% 적용

- 관련근거 : 지방계약법 시행령 제74조 및 공사계약일반조건 제20조

· 신규비목 단가는 계약당사자 간에 협의가 이루어지지 않는 경우

⇒ [설계단가 + (설계단가 × 낙찰률)] × 50/100

- 신규비목에 대하여 계약상대자와 발주청 간 이견으로 협의율(93.372%) 적용

⇒ [설계단가(100%) + 낙찰률(86.745%)] × 50/100 = 93.372%

○ 주요공종 수량 변경내역

공 종		단위	당초	변경	증·감
수량 변경	목재데크 설치	m2	331	346	증) 15
	목재데크틀 설치	m2	109	60	감) 41
신규 공종	한강변 휀스설치	경간	-	5	증) 5
	난지 거울분수 판석정비	m2	-	52	증) 52
	토사 터파기	m3	-	1,410	증) 1,410
	연약지반 치환	m3	-	423	증) 423
	절토면 고르기	m2	-	1540	증) 1,540
	사토 운반	m3	-	1410	증) 1,410
	보조 및 혼합기층	a	-	15.4	증) 15.4
	아스팔트 포장	a	-	12.6	증) 12.6
	출차 관제시스템	식	-	1	증) 1

○ 직접공사비 변경 내역                                (단위:원)

공 종	수량	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	증,감
1. 한강공원 진입시설	1	식	36,464,465	108,868,803	31,087,360	174,390,628	증)	34,442,545
	1		49,552,664	125,898,539	33,381,970	208,833,173
2. 피아노물길	1	식	87,461	1,922,559	164,671	2,174,691		0
	1		87,461	1,922,559	164,671	2,174,691
3. 난지 폐기물 전용도로 설치	1	식	-	-	-	-	증)	121,797,671
	1		47,180,656	35,233,025	39,383,990	121,797,671
4. 기타 부대공	1	식	25,190,510	4,122,134	3,159,494	32,472,138	증)	3,709,095
	1		25,248,702	4,573,171	6,359,360	36,181,233

○ 총공사비 증·감 현황                                  (단위:원)

구 분		당초	변경	증·감
총공사비		350,000,000	635,866,480	증) 285,866,480
도급비	공급가액	318,181,819	511,500,910	증) 193,319,091
	부가가치세	31,818,181	51,150,090	증) 19,331,909
	소계	350,000,000	562,651,000	증) 212,651,000
관 급 비		-	73,215,480	증) 73,215,480

○ 예산조치

- 증액된 공사비 285,866천원에 대하여 “34,000천원은 재난관리기금”을 사용하고, “251,866천원은 둔치 및 화장실 청소” 비용을 사용하여 우선 공사추진하고 설계변경 시행하고자 함

- 예산과목

· 한강공원관리 및 운영, 한강공원시설관리및개선, 한강공원접근시설유지관리, 시설비 및 부대비, 시설비 — 300,000천원

· 한강공원관리 및 운영, 한강공원시설관리및개선, 한강공원기전시설유지관리, 시설비 및 부대비, 시설비  -- 50,000천원

· 재해 및 재난예방, 재난예방 및 복구, 응급복구(재난관리기금 재난계정), 시설비 및 부대비, 시설비 -- 시 재난관리기금 34,000천원

· 한강공원관리 및 운영, 한강공원시설관리및개선, 둔치및화장실 청소, 시설비 및 부대비, 시설비 — 251,866,480원

3		조치계획

○ 상기와 같이 설계변경을 시행하여 사업추진에 만전을 기하고자 함

붙 임 : 1. 설계변경 내역서(2차) 1부

2. 재난관리기금사용 및 난지 적환장 폐기물 수송 실정보고 1부

3. 설계변경 자문위원 검토 의견서 1부

4. 신규공정 낙찰율 협의 1부

5. 방침서(난지 적환장 폐기물 수송 진입로 확충계획) 1부.  끝.