문서번호	정수과-5562
결재일자	2020. 12. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
정승열		이해원	12/04 임정규
협 조
	주무관			한미경
	주무관			김동석

『 염소시설 공정안전보고서 및 현장심사 컨설팅 용역 』

준공기한 연장 및 사고이월 보고

2020. 12.

구의아리수정수센터

(정수과)

『 염소시설 공정안전보고서 및 현장심사 컨설팅 용역 』

준공기한 연장 및 사고이월 보고

「염소시설 공정안전보고서 및 현장심사 컨설팅 용역」과 관련하여 산업안전보건법 시행령 개정안 시행 적용일에 따른 산업안전보건공단에서 공정안전보고서 접수 연기 요청으로 준공기한을 연장하고 예산을 사고이월 하고자 함.

Ⅰ		용 역 개 요

□ 용 역 명 : 염소시설 공정안전보고서 및 현장심사 컨설팅 용역

□ 용역기간 : ’20. 4. 9. ~ ’20. 12. 24.

□ 용역업체 : ****

□ 계약금액 : ************

Ⅱ		추진경과

□ 용역 계약 체결 : ’20. 4. 9.

□ 관련 서류 준비 및 검토 : ’20. 9. 29

□ 1차 현장점검 : ’20. 10. 14

□ 현장점검 후 보완사항 보완 : ’20. 10. 30.

□ 2차 현장점검 예정 : ’20. 12. 3

Ⅲ		준공기한 연장 및 사고이월 검토 보고

□ 준공기한 연장 내용

당초	변경
2020.4.09. ~ 2020.12.24.	2020.4.09. ~ 2021.6.30.

○ 연장사유

- 산업안전보건법 시행령 개정안 시행 적용일(상시근로자 5명 이상을 사용하는

사업장 : 2021.01.16.부터 적용)에 따른 산업안전보건공단에서 공정안전보고서

접수 연기 요청에 따른 계약기간 연장

□ 사고이월 금액 : ************

○ 염소시설 공정안전보고서 작성 및 현장심사 컨설팅 용역

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비

○ 사고이월 사유 : 용역기간 연장에 따른 이월

Ⅳ		향후계획

□ 염소시설 공정안전보고서 작성 및 현장심사 컨설팅 용역 계약변경 요청

□ 염소시설 공정안전보고서 작성 및 현장심사 최종 완료 후 용역 준공

붙임 : 합의서 1부. 끝.