코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
		서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	설계변경 및 변경계약 요청(한강교량 보수·보강공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역)

우리 부서에서 시행중인「한강교량 보수·보강공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역」과 관련하여 아래와 같이 설계변경 및 변경계약 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

○ 계약건명 : 한강교량 보수·보강공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(장기계속 1차)

(계약번호 20193200C27-00)

○ 계 약 일 자 : 2020.01.06.

○ 준 공 기 한 : 2020.12.31.

○ 계약상대자 : ********************

나. 설계변경 현황

(단위:원)

구 분	도 급 액		용역기간	비 고
	당 초	변 경
전체분(1회)	*************	*************	2020.1.6.~ 2022.12.31	변동없음
1차분(1회)	***********	***********	2020.1.6.~ 2020.12.31	변동없음

다. 설계변경 사유 증.감

○ 효율적 현장관리 및 원활한 준공처리를 위해 분야별 기술자 실 투입 기간 반영 및 업무용 차량 추가(1대→2대) 적용 등을 위해 설계변경 시행

(도급액 및 용역기간 변경 없음)

라. 예산과목

○ 교량관리, 교량시설물 점검관리, 교량시설물 안전점검 및 진단, 시설비 및 부대비, 감리비(12억)

붙임  1. 관련 방침서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 합의각서 1부.   끝.

							교량안전과장
★주무관							박상홍			교량관리팀장					강천수					교량안전과장					12/07 하현석
협조자				계약1팀장						원종순
시행			교량안전과-18170									(						)		접수											(						)
우						서울특별시 중구 태평로1가 서소문 별관 2층 교량안전과															/
전화		02-2133-1955						/전송			02-2133-1429					/	park-s-hong@seoul.go.kr												/	부분공개(5)