투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	설계변경 시행 및 변경계약(2차) 의뢰[2020년 한강공원 진출입시설 유지보수 공사(연간단가)]

1. 기반시설과-4873호(2020.12.4.)와 관련됩니다.

2. 우리본부에서 시행중인「2020년 한강공원 진·출입시설 유지보수 공사(연간단가)」에 대하여 아래와 같이 설계변경(제2차)을 시행하고 변경 계약을 의뢰합니다.

가. 공 사 명 : 2020년 한강공원 진·출입시설 유지보수 공사(연간단가)

나. 계약기간 : 2020. 3. 9. ~ 2020. 12. 20.

다. 계약금액 : 금350,000,000원

라. 도 급 자 : 단야공영㈜ 대표 김은숙

바. 변경내용 : 신규공종 추가 및 물량 증·감으로 인한 계약금액 변경

구 분		당초	변경	증·감
총공사비		350,000,000	635,845,480	증) 285,845,480
도급비	공급가액	318,181,819	511,481,819	증) 193,300,000
	부가가치세	31,818,181	51,148,181	증) 19,330,000
	소계	350,000,000	562,630,000	증) 212,630,000
관 급 비		-	73,215,480	증) 73,215,480

사. 변경사유 : 민원처리 및 공사현장 여건 등에 따른 신규공종 및 물량 증·감 사항 반영

아. 예산과목

- 한강공원관리및운영, 한강공원시설관리및개선, 한강공원접근시설유지관리, 시설비-300백만원

- 한강공원관리및운영, 한강공원시설관리및개선, 한강공원기전시설유지관리, 시설비-50백만원

- 재해및재난예방, 재난예방및복구, 응급복구, (재난관리기금), 시설비-34,000,000원

- 한강공원관리및운영, 한강공원시설관리및개선, 둔치및화장실청소, 시설비-251,845,480원

(예산재배정 요청: 재난관리기금 34,000천원, 둔치및화장실청소 178,630천원)

붙 임  1. 설계변경(제2차) 시행 보고서 1부

2. 2차 설계변경 내역서 1부

3. 2차 설계변경 관련 합의각서 1부.  끝.

	서울특별시한강사업본부장
주무관	양정훈		★기반시설과장	라철흠		시설부장	전영주		한강사업본부장	12/07 신용목
협조자	주무관	이은지		기획예산과장	문영일		총무과장	이상이
환경수질과장	최동주		총무부장	기봉호
시행	기반시설과-4901	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 (성수동1가 642-25)	/
전화	3780-0677	/전송	02-3780-0744	/	seed22@seoul.go.kr	/	대시민공개