문서번호	시설보수과-9824
결재일자	2020. 12. 7.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	동부도로사업소장
오상호		임영철	12/07 이규상
협조

- 가락지하차도 보수공사 -

준공기한 연기 및 계약금액 조정 검토보고

2020. 12. 4(금)

동부도로사업소

(시설보수과)

준공기한 연기 및 계약금액 조정 검토보고

「가락지하차도 보수공사」의 동절기 공사를 피하여 품질확보를 위한 준공기한 연기와 계약금액 조정에 대한 검토 보고임.

Ⅰ		관련근거

○ 가락지하차도 보수공사 계약기간 연장 검토보고(사업소장님 서면보고, ‘20.11.29)

- LMC포장(수서IC방향) 공사 진행 중 당초 예상보다 소요일수 증가로 송파역방향 LMC포장의 연내 진행여부 검토 보고

○ 준공기한 연기요청 검토보고서 제출(공사감독1처-8375(‘20.12. 2)

○ 설계변경(제1회) 보고서 제출(공사감독1처-8379(‘20.12. 2)

Ⅱ		공사개요

○ 공 사 명 : 가락지하차도 보수공사

○ 사업기간 : ‘20.10.12.~12.15.

○ 시 공 사 : *************

○ 공사금액 : 1,644백만원(도급비 1,593, 관급비 23, 폐기물처리 28)

○ 사업개요

-  아스콘 포장 절삭 45a, 초속경 LMC포장 4,500㎡, 아스콘 포장 2.6a, 콘크리트 포장 187㎡, 측구설치 600m, 표면보수 234㎡, 단면보수 172㎡, 균열보수 423m 등`

Ⅱ		보고내용

【 준공기한 연기 검토보고 】… 서울시설공단

○ LMC포장(송파역 방향) 동절기 공사중지

구 분	내 용
문 제 점	LMC포장(송파역방향) 작업 ‘20. 12. 6 ~ 12.15 예정 - LMC포장 조건(특별시방서) : 최저 0℃이하 포설불가, 일평균 4℃이하 양생대책 수립 - 해당기간 공사가능 일수 2.4일 : 최근3개년 기상자료 분석 참조 - LMC포장 연속 3일 작업 필요 → 작업 불가능
대 책	0℃이하 : 작업 중지 및 기온회복 후 작업시행 4℃이하 : 원자재 준비 및 포설 시 양생대책 수립(보온덮개, 전기매트, 보온막 등)
조치의견	품질 및 시공효율성 확보를 위해 ‘21년 3월 이후(동절기 종료) 시공함이 타당함.

○ 준공기한 연기일수 산정

합 계	동절기 공사중지 (‘20.12.16.~ ’21. 2.28.)	교통통제 후 본공사(LMC포장 등)	중앙분리대 및 수목 복구	설계변경 및 준공준비
136일	75일	30일	17일	14일

○ 조치의견

- 준공기한 연기요청은 동절기 품질저하 우려에 따른 절대공기 부족에 의한 것으로,「공사계약 일반조건 제8절 2-가)」에 의거 타당함.

- 동절기 작업중지 기간 및 수서IC방향 본공사 소요일수를 고려 시 136일 연기함이 타당함.

【 계약금액 조정 검토보고 】… 서울시설공단

○ 계약금액 조정 사유

- 발주처 계약단가 조정 요청에 따른 단가조정 발생

▸ 모체침투형 구체강화제 단가조정

- 설계사 의견조회 결과에 따른 발주처 물량변경 및 신규공종 반영지시

▸ 바닥슬래브 보수·보강 수량 및 포장계획고 변경에 따른 물량변경 및 신규공종 발생

○ 주요공종(물량 증·감) 변경사항

공 종	단 위	당 초	변 경	증·감
습기차단몰탈바름	㎡	10	900	증)890
구체강화제도포	㎡	10	1,235	증)1,225
아스콘포장(T=5㎝)	a	4.9	11.3	증)6.4

○ 공사비(도급비) 변경사항

(단위:원)
구 분		당 초	변 경	증·감
도급비	공급가액	1,429,147,254	1,907,614,225	증) 478,466,971
	부가세	142,914,725	190,761,422	증) 47,846,697
	고용개선지원금	20,852,771	29,884,353	증) 9,031,582
	계	1,592,914,750	2,128,260,000	증) 535,345,250

Ⅲ		검토의견

○ 준공기한 연기 … 서울시설공단 검토보고 반영

- 당초 준공기한 : ‘20. 12.15

- 변경 준공기한 : ‘21. 04.30(동절기 공사중단 : ’20.12.16 ~ ‘21.2.28)

- 귀 책   소 재 : 발주처

- 지체상금 부과여부 : 미부과

○ 계약금액 조정 … 서울시설공단 검토보고 반영

- 도급비 계약금액 조정에 대한 서울시설공단 검토의견 반영

- 관급비, 폐기물처리비 계약금액 조정 반영과 이전비 적용

※ 추가 예산 재배정 금액(300백만원)을 반영하여 계약금액 조정

(단위:원)
구 분		당 초	변 경	증·감
총 계		1,694,999,970	2,240,000,000	증) 545,000,030
도급비	공급가액	1,429,147,254	1,907,614,225	증) 478,466,971
	부가세	142,914,725	190,761,422	증) 47,846,697
	고용개선지원금	20,852,771	29,884,353	증) 9,031,582
	계	1,592,914,750	2,128,260,000	증) 535,345,250
관 급 비		18,169,420	23,369,990	증) 5,200,570
폐기물처리비		27,545,800	27,545,800	-
이 전 비		-	4,454,210	증) 4,454,210
실시설계용역비 (특정기술선정 심사위원 자문비)		56,370,000	56,370,000	-

〈 추가 예산 재배정(도로시설과-13226(‘20.12.1) 〉

◆『가락지하차도 보수공사』중 바닥슬래브 열화 등에 따른 보수 ·보강 물량증가에 따른  부족한 예산 요청에 대하여  2020년 『도로시설물(터널, 복개, 지하차도, 세척)일상유지보수』예산을 재배정.

사 업 명	예산현액	기 재배정액	금 회 재배정액	재배정 잔 액	재배정처
도로시설물(터널,복개, 지하차도,세척) 일상유지보수	12,140	11,041	300	799	- 동부도로사업소 : 300백만원

Ⅳ		조치계획

○ 준공기한 연기 및 계약금액 조정 검토보고 승인조치(→  서울시설공단)

- 서울시설공단 검토보고 사항에 대하여 승인 조치하고, 시공사와 변경계약 추진

○ 사업비 사고이월 추진

- 준공기한 연기에 따른 사업비 사고이월 추진

▸ 공사비 부족에 따른 추가 예산 재배정 금액(300백만원)은 금년 기성준공금 청구 시 우선 지출하고, 본 공사 예산만 사고이월

붙임  1. 계약기간 연장 검토보고서(사업소) 1부.

2. 준공기한 연기 검토보고서(서울시설공단) 1부.

3. 계약금액 조정 검토보고서(서울시설공단) 1부.  끝.