문서번호	환경수질과-7333
결재일자	2020. 12. 8.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		환경수질과장	운영부장
한미라		최동주	12/08 송영민
협조
	주무관		길인자

한강공원 내 발생폐기물(소각)

위탁처리 용역 설계변경 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 12.

한강사업본부

(환경수질과)

한강공원 내 발생 폐기물(소각) 위탁처리 용역 설계변경 보고

한강공원 내 발생 폐기물(소각) 위탁처리 용역 계약에 대하여 용역이 완수되었기에 최종물량을 정산하여 설계변경코자 함

1

개 요

○ 용 역 명 : 한강공원 내 발생 폐기물(소각) 위탁처리 용역(연간단가)

○ 용역개요 : 한강 둔치 및 수상에서 수거한 폐기물 중 수도권매립지에 반입이 불가한 폐기물(소각) 처리

○ 업 체 명 : *****************

○ 계약기간 : 2020. 1. 15. ~ 12. 31.

○ 계약물량 : ******

○ 계약금액 : *****************************

2

변경사항

○ 변경사유 : 예정물량 산정으로 계약한 사업으로써 용역완수한 최종물량에 대한 근거 자료로 정산하여 설계변경

○ 변경근거 : 폐기물처리 용역 계약조건(과업내용서 Ⅳ-2-사)

○ 변경내용

구 분	당 초	변 경	증․감	비 고
계약물량(톤)	***	******	********	**** *******
계약금액(원)	***********	***********	***********

******************************************************************

3

향후계획

○ 2020. 12. : 폐기물처리량 감소에 따른 변경계약 의뢰

○ 2020. 12. : 준공처리

붙임  1. 2020년 폐기물(소각) 위탁처리량 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.