문서번호	수질과-11943
결재일자	2020. 12. 9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		수질과장	생산부장
강지선		서한호	12/09 代신근호
협조

2020년 수돗물평가위원회

수질검사 용역 계약 변경 계획

2020. 12.

상수도사업본부

(생 산 부)

2020년 수돗물평가위원회

수질검사 용역 계약 변경 계획

2020년 수돗물평가위원회 수질검사 용역의 수질검사 건수 감소에 따라 계약금액 변경 및 완수처리 하고자함

Ⅰ		용역개요

□ 용 역 명 : 2020년 서울특별시 수돗물평가위원회 수질검사 용역

□ 용역기간 : 2020.1.3.~2020.12.31.

□ 용역업체 : ************

□ 계약금액 : ****************

□ 용역내용

❍ 수질검사(매월초)

- 검사대상

․ 매월 발주자가 지정하는 정수센터 및 수계에서 생산‧공급과정의 10개 지점 시료채수 및 수질검사(①원수, ②정수, 수도꼭지 수돗물(③직수, ④저수조 경유수), ⑤정수기 통과수 각 2개 지점씩)

- 검사항목(월1회)

․ 10개 지점 : 먹는물수질기준 60개 항목, 미네랄 4개 항목(칼슘, 마그네슘, 나트륨, 칼륨) 등 총 64항목

․ 4개 지점(원수, 저수조경유수 2개 지점씩) : THM-FP 추가

※ THM-FP : Total Trihalomethane Fomation Potential

(THM : 클로로포름, 브로모디클로로메탄, 디브로모클로로메탄, 브로모포름 값의 합)

Ⅱ		계약변경 내역

□ 변경내역 : 8월 원수 1건 미검사로 인해 계약금액 변경

❍ 당초 : 49,176,000원

❍ 변경 : 48,748,590원

❍ 감액 : 427,410원

*******************

*********************************************

**************************************************

*******************************************************************

□ 변경사유 : 8월 채수시 암사 원수 취수 불가로 총 수질검사 건수 변경

❍ 암사 원수 샘플링 펌프 고장 및 암사 취수장 채수 지점 한강물수위 상승으로 접근 불가하여 미채수

Ⅲ		향후계획

□ 변경계약 의뢰 : 재무회계과

붙임 : 합의서 1부. 끝.