“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행[중부,서부수도사업소 관내 상수도공사 건설사업관리용역-2차 최종]

우리 본부에서 시행중인 「중부,서부수도사업소 관내 상수도공사 건설사업관리용역(장기계속단가계약)」에 대하여 아래와 같이 설계변경 시행코자 합니다.

1. 용 역 명 :  중부,서부수도사업소 관내 상수도공사 건설사업관리용역

2. 용역개요

가. 급수공사 분야(급수공사, 불용관, 보호통교체, 포장 등) : 10,526건

나. 누수복구 분야(누수복구, 포장, 동결관 정비 등) : 12,706건

다. 시설물 분야(노후밸브 교체,배수지 항청소,시설물 보수 등) : 4,038건

3. 용역기간 : ‘19. 06. 22. ~ ‘21. 06. 21.(금회 : ‘20. 1. 1. ~ ‘20. 12. 31.)

4. 계약금액 : ****************************************

5. 계 약 자 : ********************

6. 설계변경 내역                                                     (단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증,감	비 고
총부기 금액	*************	*************	*
1차 금액	***********	***********	*
2차 금액(금차)	*************	*************	****************
3차 금액	*************	*************	****************

7. 변경사유

- 2차분 휴일 근무일 감소 등에 따른 차수별 물량 증감 조정

8. 예산과목(2차분)

가. 상수도사업비, 영업비용, 배수공사비(급수공사비), 신설공사비

- 당초 765,440,800원 → 변경 782,145,700원(증 16,704,900원)

나. 상수도사업비, 영업비용, 배급수비(상수도관누수복구), 수선유지교체비(감리비)

- 당초 821,311,100원 → 변경 840,395,600원(증 19,084,500원)

다. 자본적지출, 유형자산취득, 구축물(노후밸브정비), 시설비및부대비(감리비)

- 당초 327,659,600원 → 변경 288,937,000원(감 38,722,600원)

붙 임 :  1. 설계변경 내역서(2차-최종) 1부.

2. 설계변경 심의결과보고 및 합의서 각 1부.  끝.

주무관	이준상		시설과장	김형준		시설관리부장	代김형준		상수도사업본부부본부장	12/09 구아미
협조자	주무관	김윤환		주무관	박상진		누수방지과장	代성기옥
급수설비과장	김근용
시행	시설과-9560	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	부분공개(7)