투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	「한강공원 난지캠핑장 리모델링 전기 공사」설계변경 및 준공기한 연기 계약의뢰

우리 본부에서 추진 중인 『한강공원 난지캠핑장 리모델링 전기 공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경 및 준공기한 연기를 계약의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 공 사 명: 한강공원 난지캠핑장 리모델링 전기 공사

2. 공사기간: 2020.8.10. ~ 2021.1.2.

3. 공사금액

- 도급비 : 금307,108,100원

- 관급비 : 금68,770,000원

4. 도급업체: ㈜진명연합전설

5. 변경사유: 현장여건 변동에 따른 물량 증·감 및 고용개선 지원비 집행 매뉴얼 변경

6. 변경금액

구 분		공 사 비(원)		증 감	비고
		당 초	변 경
도급액	공급가액	271,201,653	368,061,100	96,859,447
	부가세	27,120,165	36,806,110	9,685,945
	고용개선	8,786,282	공급가액 내 포함	8,786,282
	도급비계	307,108,100	404,867,210	97,759,110	원단위 절삭
관 급 액		68,770,000	70,990,000	2,220,000
총 공 사 비		375,878,100	475,857,210	99,979,110	증

7. 준공기한 변경내용

- 당    초 : 2020.8.10. ~ 2021.1.2.

- 변    경 : 2020.8.10. ~ 2021.3.31.

- 변경사유 : 시설물 관리 및 안전한 캠핑장 이용을 위하여 개장 전까지 현장관리가 필요함.

8. 예산과목: 한강사업본부 공원시설과, 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설 관리 및 개선, 한강공원 난지캠핑장 리모델링, 시설비및부대비, 시설비 (예산편성부서 : 한강사업본부 기획예산과)

붙임  1. 설계변경 및 준공기한 연기 보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 준공기한 연기의뢰서 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.

							공원부장
주무관							현병철			공원시설과장					최연호					공원부장					12/09 김인숙
협조자				기획예산과장						문영일					총무과장							이상이
시행			공원시설과-5233									(						)		접수											(						)
우						서울특별시 성동구 강변북로 257(성수동1가 642-25) 한강사업본부 공원시설과															/
전화		02-3780-0861						/전송			02-3780-0745					/	qudcjf8441@seoul.go.kr												/	부분공개(5)