문서번호	설비부-19878
결재일자	2020. 12. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	시책사업과장	설비부장
손영화	이종근	12/10 이달영

『동부간선도로확장(3공구) 전기공사』

설계변경 검토 보고

2020. 12.

도시기반시설본부

( 설 비 부 )

『 동부간선도로확장(3공구) 전기공사 』

설계변경(총차12회,9차1회) 검토 보고

본 공사관련하여 방음터널 형식 변경(꺽기형→방음터널)에 따른 물량 증감 등 실정보고 사항에 대해 설계변경 소위원회를 거쳐 자문결과를 반영하고 미시공 물량 정산분 등을 반영하여 감리단에서 요청한 설계변경 및 계약금액 조정 건에 대하여 검토 후 보고 드림.

- 총차 : 당초 3,915,532천원 ➡ 변경4,037,197 천원(증121,665천원)

1		공사현황

❍ 공 사 명 : 동부간선도로확장 3공구 전기공사

❍ 규    모 : 상계주공15단지~의정부 시계 간(2.25㎞) 도로확장(4차로→6차로)

- 수전설비, 가로등 256등, 터널등: 1,150등

❍ 공사비 : 6,229백만원(도급 3,915, 관급:2,208)

❍ 감 리 단 : 동부에니지니어링(주) 외 1개사

❍ *************

(단위: 원)

구분	계약금액	준공금액	공사기간	비고
**	*************	*************	**********************
***	**********	**********	**********************	**
**	***********	***********	**********************	**
**	***********	***********	**********************	**
**	***********	***********	**********************	**
**	***********	***********	**********************	**
**	***********	***********	*********************	**
**	***********	***********	*********************	**
**	***********	***********	‘1*******************	**
**	*************		‘*******************	**

2		검토내용

관련근거

❍ 가로등 이설에 따른 실정 검토보고[설비부-2676호(`18.02.28.)]

❍ 설계변경(전기실 위치변경 등) 검토보고[설비부-10056호(`20.07.13.)]

❍ 설계변경 소위원회 자문 지적사항 보완결과 보고 [동삼감 제2020-315호(‘20.11.04.)]

❍ 설계변경(총차,9차) 요청 검토 보고[동삼감 제2020-315호(‘20.11.04.)]

❍ 설계변경 및 계약금액 조정 검토(총차12회,9차1회)

[동부엔지니어링(발)2020-3761(‘20.12.08.)]

설계변경 내용

❍ 설계변경 소위원회 자문회의 결과 반영(조건부 가결)             [단위: 원]

당초계약금액(총차)	심의요청 금액	심의결과 반영금액	증 ․ 감
3,915,532,000	4,062,762,000 (증147,230,000)	4,036,319,000 (증120,787,000)	**26,443,000

❍ 설계변경 현황                                                 [단위: 원]

구 분		공 사 비			비고
		당 초	변 경	증 ․ 감
도 급 비	*차(12회)	3,915,532,000	4,037,197,000	*)121,665,000
	9차(1회)	1,624,850,000	1,746,515,000

※소위원회 자문결과 반영,미시공분 감액,전기요금 대납 등 반영

설계변경 검토

❍ 설계변경 사유 및 공사비 증감 현황

구분	설계변경사유	공사비 증감(천원)
실정보고 (‘18.2.28.)	- 수락고가 가로등 이설공사 반영 ․장암지하차도 임시 우회도로,수락고가 등에 방음벽설치로 인한 가로등 이설 및 철거 (가로등주 철거 29개소,신설 4개소,이설21개소)	증) 28,104

구분	설계변경사유	공사비 증감(천원)
실정보고 (‘20.7.13.)	- 방음터널 전기실 위치 변경에 따른 설계보완 ․옥외배전반 위치변경(산책로→수락고가 하부) 및 제트팬 2대(37kw) 추가에 따른 부하용량 증가 ․방음터널 내/외부 공사방법 변경에 따른 전선관 및 케이블 규격,수량 변경	증) 23,704
	방음터널 비상구유도등 및 소화기표시등 설치 반영 ․시설공단 방재관련 자문회의 결과반영 ․소화기표시등 20개소 추가 ,비상구표시등 5개소 신설	증) 17,765
	- 방음터널 내 임시투광기 설치 반영 ․방음터널 시공기간 중 주행차량 안전확보를 위해 임시 투광등 설치 (투광기 69개,안정기함 46개 신설)	증) 18,513
미시공 정산 보고 (‘20.12.8.)	- VMS송출감시 카메라 설치, 수락고가확장 ITS시설 이설공사 미시공분 정산	감) 21,357

❍ 제경비 정산

구 분	공 사 비			비고
	당 초	변 경	증 ․ 감
가설공사비	18,298,335	-	감) 18,298,335
건강보험료	22,406,613	16,588,229	감) 5,818,384
연금보험료	36,679,319	23,935,431	감) 12,743,888
퇴직공제부금비	34,684,209	860,528	감) 33,823,681
합 계	112,068,476	41,384,188	감) 70,684,288

공사비 변경현황(총차기준)

[단위: 원]

공 종	공사비			비 고
	당 초	변 경	증,감
1. CABLE TRAY(할증제외구간)	21,632,305	21,632,305	-
2. CABLE TRAY(할증구간)	6,994,162	6,994,162	-
3. 접지설비공사	1,368,309	1,368,309	-
4. 가로등 설비 공사	127,779,120	127,779,120	-
5. 경관조명 설비공사	57,005,368	57,005,368	-
6. 가로등 재사용 철거	1,473,050	1,473,050	-
7. 살충기 철거설치	26,673,522	26,673,522	-
8. 보안등주 철거	3,048,096	3,048,096	-
9. 보안등주설치공사	18,280,217	18,280,217	-
10. 교통정보시스템 지장물 이설공사	45,785,768	45,785,768	-
11. ITS시설(CCTV,CDD 등)이설공사	36,794,641	36,794,641	-
*********************	*********	*	**********	*****
13. 광케이블 LINE 변경 설치	9,223,718	9,223,718	-
***************	**********	**********	********	*****
15. 방음벽쪽 ITS이설 공사	27,407,561	27,407,561	-
16. ITS시설 이설공사	48,149,150	48,149,150	-
17. 지하(장암,상도)차도 전기공사	342,159,239	342,159,239	-
18. 수락고가확장 가드레일 이설공사	14,077,174	14,077,174	-
**********************	**********	**********	***********	*****
20. 상도 방음벽 터널 등기구설치 공사(STA.6+540~6+780)_전기 ]	78,338,276	78,338,276	-
**************************************************	***********	***********	**********	*** *****
22.소화기 탈착감시시스템 전기공사(장암/상도지하차도)	3,692,069	3,692,069	-
23.전기공사::1-1.VMS 이설 공사(전기)	32,408,060	32,408,060	-
************************************************	***********	***********	**********	*** *****
*********************************	***********	***********	***********
**********************************	*	**********	**********
********************************	*	**********	**********
*********************	*	**********	**********
소 계	2,427,585,480	2,493,714,421	66,128,941
29. 제경비외	1,380,549,510	1,306,479,733	-74,069,777
소 계	3,808,134,990	3,800,194,154	-7,940,836
30. 전기사용료 대납	103,970,510	226,981,406	123,010,896
31. 전기안전관리 대행 수수료 대납	3,426,500	10,021,440	6,594,940
*******	*************	*************	*************

건설사업관리기술자 검토의견

❍ ******************************************************************************************************************************************

❍ ***************************************************************************************

3		보고자 의견

검토결과 조치의견

❍ 건설사업관리기술자의 설계변경 기술검토의견 사항을 검토한 결과 검토의견이 적정한 것으로 판단되어 이를 총무부에 변경 계약 의뢰하고자 함.

- 설계변경 내용

구 분	당 초	변 경	증 감
총차(12회)	3,915,532,000	4,037,197,000	*)121,665,000
9차(1회)	1,624,850,000	1,746,515,000

※ 계약기간 변경없음

붙임 : 1. 건설사업관리단 설계변경 검토 보고서(합의각서 포함) 1부.

2. 변경설계내역서 1부. 끝.