문서번호	방재시설부-17414
결재일자	2020. 12. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	방재시설부장
김규희		代김규희	12/10 代김태중
협조	주무관		노진우
	주무관		김현곤

「낙산성곽길 정비 공사」

설계변경(2회) 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020.12

도시기반시설본부

(방재시설부)

「낙산성곽길 정비 공사」

설계변경(2회) 검토 보고

우리 본부에서 시행 중인「낙산성곽길 정비 공사」의 설계변경(2회)에

대한 검토 보고임

□ 공사개요

○ 위    치 : 종로구 종로6가 69번지 일대

○ 사업내용 : 서울디자인지원센터~ 낙산정상 한양도성 내측 순성길 정비

- 규  모 : 연장 863m, 면적 15,220㎡, 폭 15m내외

- 내  용 : 하수관․차도 정비, 순성길 정비, 장대석 설치, 주민쉼터 조성 등

○ 공사기간 : 2019. 11. 11. ~ 2020. 12. 15

○ 도 급 비 : 1,709백만원

○ 도 급 자 : 원택건설(주), 에코아트조경(주)

○ 감 리 자 : 서울시설공단

□ 설계변경 추진경위

○ 2019.11.11. 공사착공

○ 2020.07.14. 설계변경 시행(1회)

○ 2020.11.09. 낙산성곽길 정비공사 관련 협의(종로구 → 도기본)

- 흥인지문공원 공원 정비 변경사항

○ 2020.11.18. 추가공사 요청(주거환경개선과 → 도기본)

- 버스정류장 주변 추가 정비

○ 2020.11.26. 실정보고 승인 (조경분야)

- 정자 존치(민원), 순성길 포장재 경화토→야자매트 변경 등

○ 2020.12.04. 실정보고 승인 (토목·조경분야)

- 종로구·주민 요청사항 반영, 현장여건에 따른 변경사항

○ 2020.12.09. 변경설계서 제출(시설공단 → 도기본)

□ 설계변경 검토사항

○ 설계변경 사유

- 유지관리 기관(종로구) 및 주민 요구사항 반영

- 현장실정 고려 기 승인한 실정보고 사항 반영

○ 설계변경 내용

구 분		주요 변경 내용	증 · 감(천원)	비 고
***	*****		********	주계 약자
	***	*************** ******************** *************** ************* ********	********
	*****	************* ************** ******** ***************	*******
	*** ***	******************* ********************** **************** ************* *******	********
	****	***********	********
******	*******		********
	****	*************** ********************* ******************	*******
	***	****************** ****************** *********************	*******
	****	*************** ******	*******
	****	**********	*****
** ***		************* *********************** ********************* ***********	*******	부계 약자

○ 도급비 증․감액

(단위 : 천원)

구 분		당 초	변 경	증․감	비고
도급비	공급가액	*********	*********	*******
	부가세	*******	*******	****
계		*********	*********	******

□ 보고자 의견

○ 민원 요청사항 및 현장여건 등을 반영한 설계변경으로 기 승인된 실정보고와 같이 계약금액 조정이 타당함.

붙임 1) 관련공문 및 보고서 각1부.

2) 설계변경 내역서 1부.

3) 제비율검증 1부. 끝.