실정보고 검토서

공사명

퇴계로(2단계) 보행친화공간 재편공사

공사개요

· 위 치 : 퇴계로2가~광희동사거리

· 규 모 : 보행환경 개선 L=1.5km

· 공사기간 : ‘19.08.~‘20.11.

· 도 급 비 : 3,851백만원

· 시공사 : ㈜광혁건설

· 감리단 : ㈜이산

· 설계사 : ㈜서우TEC

실정보고 건명

태풍 등 가림막 휀스 설치 반영 보고

실정보고

사유

- 태풍 마이삭(9.2~3) 및 하이선(9.7~8) 등 우기대비 가림막    휀스 추가설치 및 재설치(1,549경간) 하여 반영이 필요

시내방면 미반영된 이동 설치비 902경간 반영 필요

건설사업관리단

검토의견

- 태풍 및 우기시 가림막 휀스 고정 및 추가설치 필요

공기증감

0 개월

변경(안)

구분(경간)	당초	변경	비고(증감)
**	**	*****	******
**	*	***	*****
***	*	********	**********

예산조치 계획

당초 도급비 범위내 시행가능 (    )

당초 사업비 범위내 시행가능 ( ○ ) : 증)31,500천원

별도(추가) 예산 확보 필요   (    )

추가 행정절차 이행 필요여부

-

발주처

검토의견

건설사업 관리단의 검토의견이 타당하여 승인조치하고 추후 설계변경에 반영하고자 함.

비 고

가림막 휀스 재료비 손율을 제외하고 이전설치비만 반영

결재

담당

노순재

과장

장종환

부장

12/10

김용제