“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강서수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(계측관리과장)
(경유)
제목	수도계량기 교체공사 추진현황 자료 제출

1. 계측관리과-11156(2020. 12. 9.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 수도계량기 교체공사 추진현황을 아래와 같이 제출합니다.

가. 계약현황

계약일	계약금액 (원)	계 약 수 량 (개)
		계	15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm
‘20.07.22.	198,553,500	9,069	7,938	150	360	432	189	-

나. 추진현황

준공일	준공금액 (원)	교 체 수 량 (개)
		계	15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm
‘20.11.15.	184,833,000	8,845	7,774	134	337	420	180	-

다. 미교체 사유별 현황

미 교 체 사유 (개)
계	공사 전 교체 (폐전 포함)	공 가	교체거부	관 노후	적치물장애
224	33	2	-	131	58

라. 미 교체 계량기 교체방안에 대한 의견 : 교체장애수전 등록 및 미교체 사유 분석을

통한 적극적 교체 추진.  끝.

	강서수도사업소장
★주무관	서주태		현장민원과장	12/10 추경민
협조자
시행	현장민원과-18885	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/	http://water.seoul.go.kr
전화	02-3146-2510	/전송	02-3146-2509	/		/	부분공개(5)